문서번호	배수과-8361
결재일자	2019.9.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		배수과장
박종혁		09/02 代이재학
협 조
	주무관		이재학

노후송배수관 정비공사 추진실적보고(7월)

2019.  9.

급  수  부

[배수과]

노후송배수관 정비공사 추진실적 보고(7월)

2019년도 노후 송배수관 정비공사 월별 추진실적을 점검하여 공정관리 등 사업추진이 원활이 진행될 수 있도록 추진하고자 함.

□ 현   황

○ 정비목표 : 17km

○ 사 업 비 : 49,500백만원

○ 발주건수 : 19건

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동	본부1)	기타2)
발주대상(건수)	19	4	1	2	1	2	3	4	2
정비계획(㎞)	17	3.1	0.6	2.1	1.6	0.8	3.0	3.8	2.0
사업비 (백만원)	49,500	7,500	1,300	4,000	3,200	3,000	8,800	11,200	5,500	3,900	1,100

※ 본부(대형 상수도관 진단 10억, 예비비 등 기타 29억),기타(감리비 11억, 시설부대비 0.1억)

□ 추진실적

○ 7월말 현재 정비실적 : 7.1㎞

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
정비목표	17	3.1	0.6	2.1	1.6	0.8	3.0	3.8	2.0
전월실적	4.2	0.3	-	1.0	1.1	0.7	0.5	0.5	0.1
당월실적	2.9	0.8	0.1	0.3	0.7	0.0	0.2	0.7	0.1
실적누계	7.1	1.1	0.1	1.3	1.8	0.7	0.7	1.2	0.2
정비율(%)	41.7	35.4	16.7	61.9	112	87.5	23.2	31.5	10.0

□ 향후계획

○ 교통소통대책수립 용역 및 굴착허가 지연 등의 사유로 착공시기는 다소 부진하였으나 전체 공정 이상없이 추진중 임.

○ 매월 사업 추진실적을 점검하여 목표달성에 차질이 없도록 지속적인 모니터링 시행.  끝.