투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신	관리과장
(경유)
제목	준공기한 연기요청(제3처리장 침전지(B계열) 보수공사)

1. 공사감독2처-12021호(2019.8.29.)와 관련입니다

2. 위 호와 관련 우리 센터에서 시행하고 있는 『제3처리장 침전지 D열 보수공사-중랑』 건에        대하여 아래와 같은 사유로 준공기한을 연기하고자 하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공사현황

- 공 사 명 : 제3처리장 침전지 D열 보수공사-중랑

*************************

- 공사기간 : 2019. 01. 07.~ 2019. 09. 21.

-***********************

나. 준공기한

- 당 초 :  2019. 01. 07.~ 2019. 09. 21.

- 당 초 :  2019. 01. 07.~ 2019. 10. 19.

다. 연기사유 : ***************************************                     *******

라. 지체상금 : 미부과

따로붙임 : 준공기한 연기 방침서 및  합의서 1부.  끝.

	시설보수과장
주무관	이생기		시설보수과장	09/02 임준빈
협조자
시행	시설보수과-4837	(		)	접수		(		)
우	04809	서울특별시 성동구 자동차시장3길 64 용답동247-6 (용답동, 중랑물재생센터)	/	www.seoul.go.kr
전화	02)2211-2576	/전송	02)2211-2579	/		/	부분공개(6)