투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신	서울시설공단이사장
(경유)
제목	준공기한 연기요청 승인 통보

1. 공사감독2처-12021호(2019.8.29.)관련입니다

2. 위 호와 관련 우리센터에서 시행하고 귀 공단에서 감독하고 있는 ******

***************에 대한 준공 연기요청 보고에 대해 아래와 같이 검토후     통보하오니 현장관리에 만전을 기하여 주시기 바랍니다

가. 실정보고 검토 회신내용

공단검토내용	사업소 검토 회신내용	비고
작업지시에 따른 9지의 경우 1~8지 보다 부유 물질이 많고 유해가스 측정되어 충분한 환기 및 내부 물청소 반영으로 공종별 작업일수가 증가되어 준공기한을 연기하여 품질 확보 및 공정 관리에 만전을 기함이 타당하다고 판단됨.	공단 검토내용과 같이 준공기한 연기하여 품질 확보 및 공정관리에 만전을 기함이 타당하다고 판단됨.

끝.

	서울특별시중랑물재생센터소장
주무관	이생기		시설보수과장	09/02 임준빈
협조자
시행	시설보수과-4836	(		)	접수		(		)
우	04809	서울특별시 성동구 자동차시장3길 64 용답동247-6 (용답동, 중랑물재생센터)	/	www.seoul.go.kr
전화	02)2211-2576	/전송	02)2211-2579	/		/	부분공개(6)