문서번호	기전과-5104
결재일자	2019.9.2.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장
이태근		09/02 代김용문
협조

『2019년 교통안전표지 설치 및 유지보수 공사(연간단가)』

제2차작업 완료 및 실정 보고

2019.  8.

『2019년 교통안전표지 설치 및 유지보수 공사(연간단가)』

제2차작업 완료 및 실정 보고

『2019년 교통안전표지 설치 및 유지보수 공사(연간단가)』 제2차 작업지시에 대한 공사를 실시하고 그 결과를 보고드림

		관련근거

□ 2차 작업지시

○ 2차 작업지시 : 기전과3340(2019.6.10)

○ 2차 작업지시(추가1) : 기전과4105(2019.7.11)

□ 2차 작업 완료 보고

○ 감리업체 : 한국검정㈜, 한검 제 19313(2019.8.30)호

		공사개요

□ 공 사 명 : 2019년 교통안전표지 설치 및 유지보수공사(연간단가)

□ 공사위치 : 남부도로사업소 관할지역(금천, 관악, 동작구, 서초, 영등포 등)

□ 공사내용 : 교통안전표지 설치 및 유지보수

□ 계약금액 : 금81,570천원

□ 시 공 사 : ****************

□ 감 리 사 : ***************

□ 제2차 작업지시 내용 : 총 42건

○ 작업기간 : 2019. 6. 11. ~ 8.30.

○ 규    제 : 17건 - 서초구 방배동 방배로47 좌회전금지표지 신설 등

○ 일상보수 : 25건 - 금천구 디지털로154 지주교체 등

		실정보고

□ 제2차 작업결과 : 총 42건(완료 40건, 미완료 2건)

○ 규제사항 : 17건(완료 15건, 미완료 2건)

○ 일상보수 : 25건(완료 25건, 미완료 0건)

<주요작업내용> - 세부사항 “별첨”

지시 번호	구 분	위 치	작 업 내 용	작업 결과	비고
2-1	규제 사항	관악구 신림동 산 137-7 (미림여고 북측교차로)	#224(속도40) -------- 1(신설)
2-2	일상 보수	서초구잠원동잠수교남단지하차도입구 (남⇒북방향)	지주쓰러짐⇒지주재설치---1식 (표지,지주재사용)
2-3	일상 보수	서초구잠원동잠수교남단 (회전교차로중앙)	지주쓰러짐⇒지주재설치----1식 (표지재사용)
2-4	규제 사항	서초구방배동방배로47 (누리시아웨딩홀앞)	#214(좌회전금지) ---- 2(신설)
2-5	규제 사항	동작구신대방동보라매로70앞 (보라매e편한세상 앞)	#420(보조, 우방향) ---1(신설)
2-6	규제 사항	영등포구도림동255-3 (신도림고가차도 교차로 앞)	#224(속도 50) ------- 1(신설)
2-7	일상 보수	국립현충원입구 (현충일행사대비)	횡단보도표지 -------- 2(임시)
2-8	규제 사항	영등포구신길동신길로108 (남서울아파트 앞)	#329(비보호) -------- 1(철거)

□ 작업 미완료 실정보고 : 2건

<미완료 사항>

지시 연번	구분	위 치	작업지시 내용	미완료 사유
2-4	규제 사항	서초구방배동방배로47 (누리시아웨딩홀앞)	#214(좌회전금지) --- 2(신설)	선행 공정인 신호등 미작업으로 설치 불가 ⇒ 선행공정 완료시 작업 예정
2-15	규제 사항	서울관악구신림동1642-9 (청암두산위브센트움)	#216(유턴금지,780)------1(신) #216(유턴금지,780)----1(철거) #132(횡단보도) ------- 1(신) #324(횡단보도)--------1(철거) #219(주차)+428(견인)--1(이설)	선행 공정인 노면표지 미작업으로 설치 불가 ⇒ 선행공정 완료시 작업 예정

□ 예산현황

구 분		재배정예산	계약금액	전차수까지 누계금액	2차작업 금액	계약잔액	비 고
총공사비		92,900,000	81,570,820	9,540,000	15,570,000	56,460,820
도급비	공 급 가 액		74,155,291	8,672,728	14,154,546	51,328,017
	부가가치세		7,415,529	867,272	1,415,454	5,132,803
	계		81,570,820	9,540,000	15,570,000	56,460,820

□ 책임감리원 검토의견

○ 금회 2차작업 대상 42건중 40건을 완료하였으며 미완료한 2건에 대하여는 추후 현장여건에 따라 공사시행 예정임.

※ 붙 임 - 책임감리원 완료보고서(검토서, 내역서, 관련사진 등)

		보고자의견

□ 책임감리원 실정보고 검토 결과

○ 제2차 작업지시 총 42건 중 40건을 완료하였으며 미완료 사항 2건은 현장여건에 따라 노면 및 신호공사와 협의하여 추후 시행코자 하며,

○ 경찰청 규제심의 사항 및 일상 유지보수 공사는 계속 실시하여 안전사고예방에 만전을 기하고자 함.

붙  임 : 1. 책임감리원 작업완료 보고서 1부.

2. 2차작업완료 감리조서 1부.  끝.