문서번호	급수운영과-15342
결재일자	2019.9.2.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관		급수운영과장
이재헌		09/02 최춘근
협 조

준공기한 연기보고

(신설-73, *************)

2019. 09.

강남수도사업소

(급수운영과)

준공기한 연기보고

1. 현    황

○ 공사위치 :******************

○ 작업지시 : 신설-73

○ 공사개요 : 신축

○ 공사기간 : 2019.08.23. ~ 2019.08.30.

2. 보고내용

○ 상기 공사위치는 착오로 부과된 급수공사비에 대한 추가 고지로 인해 기간 내 공사시행이 어려운 실정이므로 추가 부과된 급수공사비 납부 확인 후 공사시행하고자 합니다.

※ 관련문서 : 급수운영과-14909(2019.08.26.)호, 급수공사비 추가 고지 관련 보고

․ 당초 : 3,850,000원

․ 변경 : 6,683,000원

3. 조치의견

○ 상기와 같은 사유로 「2019년 수서동 외 14개동 상수도공사(장기계속단가계약)」 의 계약업체 한배엔지니어링 주식회사 대표 강신환으로 하여금 공사 준공기간을 연기하여 공사시행에 만전을 기하고자 합니다.

․ 당초 : 2019.08.23. ~ 2019.08.30.

․ 변경 : 2019.08.23. ~ 2019.09.30.

○ 지체상금 부과여부 : 미부과.  끝.