문서번호	물재생계획과-12039
결재일자	2019.9.2.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		하수계획팀장	물재생계획과장
김민석		김준형	09/02 하상문
협조

반포천 유역분리터널 공사 주민건의사항 검토 보고

2019. 8.

물재생계획과

반포천 유역분리터널 공사 주민건의사항 검토 보고

강남역 일대 침수방지사업으로 추진 중인 반포천 유역분리터널 공사 관련 주민 건의사항에 대한 검토결과를 보고 드림

□ 사업개요

○ 위    치 : 서초구 법원로 10 ~ 서초구 사평대로 240 일원

○ 사업규모 : L=1,162m(터널부 944m, 유입부 및 유출부 146m)

○ 사업기간 : 2018.2.1. ~ 2021.1.30.(36개월)

○ 총사업비 : 46,121백만원(도급비 33,701백만원)

○ 시 공 사 : ㈜호반산업 외 1개사 ※ 건설사업관리 : ㈜도화엔지니어링 외 2개사

서초구 시행

L=120m

L=98m

공사계획 평면도

□ 추진현황

○ ’15. 9.25. ~ '17. 3.31 : 반포천 유역 침수해소 기본 및 실시설계용역

○ ’17. 9.29. : 시설공사 발주

○ ‘18. 2. 1. : 공사 착공

○ ’19. 2.21. : 미도아파트 주민설명회(1차)

○ ‘19. 7.24. : 미도아파트 주민설명회(2차)

○ ‘19. 8월 현재 : 터널 수직구 설치 완료, 본선구간 32m 굴진(공정율 23%)

□ 주민 건의사항

○ 서리풀 공원내 경사형 엘리베이터(Elevater) 설치

- 지역 주민, 특히 교통약자의 교통편의를 위해 서리풀 공원 사면(반포 미도2차 아파트 서측)에 엘리베이터 설치 요청

○ 재건축 관련 비오톱(Biotope) 등급 하향 요청

- 부지내 비오톱 등급(現 1~2등급) 완화 요청

○ 반포미도아파트 재건축 사업에 지장이 없도록 공사 시행

- 터널 구조물이 부지 경계에 인접하여 설치되므로 향후 아파트 재건축 사업 추진에 문제가 없도록 공사 시행

○ 공사로 인한 소음 방지 및 서리풀 공원사면 안정성 확보

□ 검토결과

○ 엘리베이터 설치

- 엘리베이터 설치 필요성은 관련기관, 부서에서 공감한 상태이나, 사전절차 추진, 공사시행 등 행정절차 이행에 관련기관(부서) 협의가 필요함

관련기관(부서)	검토의견
서초구 공원녹지과	공사로 인한 주민불편사항으로 공사 시행부서(도시기반시설본부)에서 공사계힉을 수립, 서초구와 협의하여 추진
도시기반시설본부 방재시설부	엘리베이터 설치는 공사와 무관하며, 공원내 시설물 설치에 따른 공원조성계획 변경, 서울시도시공원위원회 심의 등 사전절차가 필요하므로 공원관리주체인 서초구에서 검토 후 사업 추진
서울시 물재생계획과	엘리베이터 설치에 필요한 예산은 서울시에서 긍정적으로 검토중에 있으나, 부서간 이견으로 설치 주체가 불명확하여 추진이 어려움

○ 비오톱(Biotope) 등급 하향 조정

- 비오톱 등급 조정 담당부서(시설계획과)에 민원내용을 통보하여 검토

○ 재건축 공사에 지장이 없도록 공사 시행

- 터널구간은 아파트 건물과 최소 이격거리가 18.9m이며, 터널공사에 적용된 TBM은 여굴 및 안정성이 우수한 공법으로 향후 아파트 재건축 공사에 문제가 없음 (☜ 7.24 주민설명회 현장 답변)

○ 공사 소음 및 공원사면 안정성

- TBM은 기계식 굴착 방식으로 소음, 진동에 문제가 없으며, 공원 및 아파트에 계측기(구조물경사계, 균열게이지, 변위량 측정기)를 설치하여 안정성 상시 확인 (☜ 7.24 주민설명회 현장 답변)

□ 향후계획

○ 엘리베이터 설치건 관계기관 협의

- 서울시 물재생계획과, 도시기반시설본부, 서초구 공원녹지과

○ 비오톱(Biotope) 등급 조정 검토 요청(물재생계획과→시설계획과)

붙임  1. 엘리베이터 설치위치(안) 1부.

2. 미도아파트 주변 비오톱 등급 현황 1부.