문서번호	치수과-12079
결재일자	2019.9.2.
공개여부	부분공개
방침번호

★주무관		치수팀장		치수과장		안전건설교통국장
박철홍		김성신		민병기		전결 09/02 손경철
협조
	재무과장		홍명안
	계약팀장		양영종

★ ◉

「2019년 하수도 준설(물청소)공사(단가계약)」

설계변경(2차) 검토 보고

2019. 8.

성   동   구

(치 수 과)

사 전  검 토 사 항

::: 해당사항에 ☑ 표시하시기 바랍니다.
항 목		검 토 여 부
사업구분		신규사업 □ 공약(약속)사업 □ 계속사업 □ 인센티브/공모사업 □
소통분야 고려사항		●	구민		:		유 □ ( ) 무 ☑
		●	전문가		:		유 □ ( ) 무 ☑
		●	이해당사자		:		유 □ ( ) 무 ☑
여성친화 도시		성 평 등 □ 안 전·편 의 □ 가 족 · 공 동 체 회 복 □ 여 성 참 여 □
기타 고려사항		일 자 리 □ 환경영향 □ 안 전 ☑ 유지비용 ☑ 바른 공공언어 □
		성 인 지 □ 취약계층 □ 장 애 인 □ 디 자 인 □ 갈등발생 요인 □
타자원 활용		●	중앙부처	:		유 □ ( ) 무 ☑
		●	서울시	:		유 ☑ ( 시비 재배정 ) 무 □
		●	기업	:		유 □ ( ) 무 ☑
		●	민간단체	:		유 □ ( ) 무 ☑
언론홍보 계획		기획보도 □ 보도자료 □ SDTV □ 성동뉴스레터 □ 성동구소식지 □
		기 고 문 □ 전자행정서비스 □ S N S □ 기타 (리플릿 등) □ 없 음 ☑
	● 홍 보 제 목 :
	● 중점 홍보사항 - -
	※ 우리 구만의 차별화된 사업내역과 중점 부각하여 홍보할 사항을 중심으로 ‘홍보제목’을 선정하여 간결하게 기재하시기 바랍니다.

「2019년 하수도 준설(물청소)공사(단가계약)」

설계변경(2차) 검토 보고

우리 구에서 시행중인 『2019년 하수도 준설(물청소)공사(단가계약)』와 관련하여 계약 물량 증·감에 따른 설계변경을 시행코자 함

Ⅰ		사업현황

○ 사 업 명: 2019년 하수도 준설(물청소)공사(단가계약)

○ 사업기간: 2019. 3. 11. ~ 2019. 12. 31.

○ 공사개요: 하수관로 준설 3,525㎥, 세정 68,000m, 빗물받이 준설 11,200개소 등

○ 도 급 자: (주)제일토목 대표 김현녀

○ 도 급 비: 금1,182,280,000원(금일십일억팔천이백이십팔만원)

Ⅱ		설계변경 사유

○ 하수관로 긴급준설비 예산재배정 알림(성동구)

- 사업비 150백만원(시비 재배정), 물재생계획과-10984(2019.08.08.)호

- 마장동 도시재생활성화 지역 내 긴급준설비 예산재배정에 따른          준설작업 시행

Ⅲ		설계변경 내역

○ 도급비 변경 내역

(단위: 원)

구 분	당 초	변 경	증 ․ 감
총공사비	1,369,250,000	1,519,250,000	증150,000,000
도 급 비	1,182,280,000	1,332,280,000	증150,000,000
이 전 비	186,970,000	186,970,000	-

○ 주요물량 증·감 내역

공 종		단위	수 량				비고
			당 초	변 경	증 ․ 감
준설공	인력+흡입준설	㎥	870	1,500	증	630
	암거준설(기계)	㎥	1,500	2,100	증	600
	흡입준설	㎥	1,000	1,410	증	410
	바켓준설	㎥	155	235	증	80
	준설토상차	㎥	1,500	2,570	증	1,070
물청소	하수관물청소	m	68,000	54,800	감	13,200
빗물받이준설공	빗물받이 흡입준설 1호	개소	3,000	2,000	감	1,000
	빗물받이 인력준설 1호	개소	2,000	1,990	감	10
	빗물받이 인력준설 2호	개소	1,200	1,000	감	200

Ⅳ		조치의견

○ 상기 내용과 같이 시비(재배정) 사용에 따른 계약 물량 증·감(마장동 도시재생활성화 지역 내 준설량 반영)에 대하여 설계변경(2차)를 시행하고 향후 정산처리하고자 함

붙임  1. 일상감사의견서 1부

2. 변경내역서(2차) 및 제경비검증확인서 각 1부.  끝.