문서번호	목동사업과-8501
결재일자	2019.9.2.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
신월야구공원관리팀장		목동사업과장	체육시설관리사업소장
이제동		이종섭	09/02 김정열
협조

『신월야구공원 주차장 신설 타당성 조사 용역』

용역기간 연기 검토 보고

2019. 9. 2

체육시설관리사업소

(목동사업과)

『신월야구공원 주차장 신설 타당성 조사 용역』

용역 기간 연기 검토 보고

『신월야구공원 주차장 신설 타당성 조사 용역』의 야구공원 이용 주차수요 보완조사에 필요한 용역기간 연기 요청에 대한 검토 보고임.

		추진근거

○  『신월야구공원 주차장 신설 타당성 조사 용역』과업 연기 요청

㈜동해종합기술공사 교통부19-00477(2019.9.2.)

		현 황

○  계 약 명 : 신월야구공원 주차장 신설 타당성 조사 용역

○  계약금액 : 금19,998,600원

○  계약업체 : ㈜동해종합기술공사

○  공사기간 : 2019.06.07.~2019.09.06.[92일간]

		준공기한 연기 요청사유 및 내용

○  야구공원 이용 주차수요 보완조사 및 조사 결과를 반영한 대안의 심도 깊은 검토가 필요하나, 절대공기가 부족하므로 향후 원할한 과업 수행 진행을 위하여 과업기간 연장 필요

○  용역기간 연기 요청 내용

용역 기간			비 고
당초	변경	증감
2019.6.7.~9.6	2019.6.7.~11.5	61일(증)

		검토 내용

○  신월야구공원 주차장 신설 타당성 조사 용역 마무리 보고회시(2019.8.30.) 당초 과업은 적정 수행되었다고 판단되나 주차장 확보 방안으로 제시된 서서울예술교육센터 주차장 확대안과 관련, 교육센터 주변에 대한 부지의 주차수요 조사 및 서서울예술교육센터 관계부서 협의 및 의견 등이 결여되어 추가 기간이 필요하다고 판단됨.

○ 서서울예술교육센터 주차장 이용과 관련하여 서서울예술교육센터, 시 문화정책과 및 체육정책과 등과의 폭 넓은 사전 협의 후 협의 결과가 용역결과에 포함되어야 한다고 봄.

○ 기간연장은 본 용역의 당초 계약기간 보다 2개월 정도 연장되어야 한다고 보나, 이 경우 사업시행(예산확보 및 시행 등)에 지연되는 사항이 아니고 시가 필요해서 보완하는 것이며 시 입장에서는 불이익이 없다고 봄.

		조치계획

○ 본 용역에 대해 추가 예산없이 2개월 연장하여 보다 세밀한 조사 및 관계부서 협의 결과등을 포함하여 용역을 마무리 하고자 함.

첨부 : 신월야구공원 주차장 신설 타당성 조사 용역 과업 연기 요청 1부.  끝.