문서번호	조경과-12783
결재일자	2019.9.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		조경관리팀장	조경과장
변동풍		김병완	전결 09/02 문길동
협조

-2019년 가로변 녹지량 확충사업-

대상지 변경(추가) 요청 승인 검토 보고

푸른도시국

(조경과)

-2019년 가로변 녹지량 확충사업-

대상지 변경(추가) 승인 요청 검토보고

마포구에서 ‘가로변 녹지량 확충사업’ 추진과 관련하여 사업 변경 승인 요청이 있어 검토하고 보고합니다.

[관련대호 : 마포구 공원녹지과-15536호(2019.8.28.)]

1		추진과정

❍ 2019. 1.25.: 사업추진계획 수립 및 시달(서울시)

❍ 2019. 5.20.: 설계심의(성산로, 월드컵북로, 가양대로)

❍ 2019. 8. 7.: 공사비 재배정(월드컵북로, 가양대로)

❍ 2019. 8.23.: 공사비 재배정(성산로), 공사발주(월드컵북로, 가양대로)

❍ 2019. 8.28.: 사업 변경 승인 요청(마포구)

2		예산 재배정 현황

예 산 액(천원)	기재배정액(천원)	재배정 잔액(천원)	비고
600,000	37,879	222,121

3		변경 요청 사항

구 분	당 초	변 경
대 상 지	- 월드컵로, 가양대로, 성산로	- 월드컵북로, 가양대로, 성산로 - 합정역 교통섬 등 4개소(추가)
규 모	1,880㎡	2,900㎡
사 업 비	금600백만원	금600백만원
사업내용	- 중앙분리대 및 가로변 녹지 조성 기조성 녹지 정비	- 중앙분리대 및 가로변 녹지 조성 - 기 조성 녹지 정비 - 교통섬 녹지 정비

4		변경 요청 사유

❍ 2018년 지역건의로 ‘가로변 녹지량 확충사업’을 추진하던 과정에 사업비 내에서 현장 여건 및 사업 목적(녹지량 확충)에 맞게 사업 규모를 조정하여 예산을 효율적으로 집행하고자 사업 변경을 요청

5		보고자 의견

❍ 사업 변경 요청서를 검토한 결과 변경 사유와 사업 목적 등이 적합하다고 판단되므로 사업비 내에서 시행토록 변경승인하고자 함.

붙임 : 사업 변경 승인 요청서 1부.  끝.