투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서부공원녹지사업소
수신	공원운영과장
(경유)
제목	하늘공원 근로자 대기실 및 창고 신축 전기공사 감리용역 설계변경 및 완수기한 연기 시행

시설과-1961(2019.9.2.)호와 관련, 『하늘공원 근로자 대기실 및 창고 신축 전기공사 감리용역』에 대하여 다음과 같이 설계내역 변경 및 완수기한을 연기하고자 합니다.

가. 용 역 명 : 하늘공원 근로자 대기실 및 창고 신축 전기공사 감리용역

나. 위    치 : 마포구 월드컵로 243-60(하늘공원)

다. 계약금액 : 금12,000,000원(금일천이백만원)

라. 용 역 사 : (주)유정이엔지   대표 유미경

마. 완수기한

1) 변경전 : 2018. 12. 12. ~ 09. 06.

2) 변경후 : 2018. 12. 12. ~ 09. 27.(21일 연기)

바. 과업내용

1) 변경전 : 하늘공원 근로자 대기실 및 창고 설치공사 감리용역

2) 변경후 : 하늘공원 근로자 대기실 및 창고 설치공사 및 풍력발전시설10kW 설치 감리용역

사. 연기사유 : 하늘공원 풍력발전기 설치에 따른 과업내용 및 감리일수 추가 반영

아. 귀책소재 : 서울특별시 서부공원녹지사업소(지연배상금 미부과)

붙임  관련 보고서, 변경과업지시서 각 1부.  끝.

	시설과장
주무관	홍용현		기전시설팀장	윤상섭		시설과장	09/02 문인기
협조자
시행	시설과-1963	(		)	접수		(		)
우	03901	서울특별시 마포구 월드컵로 243-60	/	http://worldcuppark.seoul.go.kr
전화	300-5560	/전송	300-5569	/	bluemoon5922@seoul.go.kr	/	대시민공개