투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신	총무과장
(경유)
제목	설계변경(2회) 시행 및 계약의뢰-한강공원 접근시설 유지보수공사

한강공원 접근시설 유지보수공사』에 대하여 아래와 같이 설계변경(2회을 시행하고 계약의뢰 하고자 합니다.

가. 공 사 명 : 한강공원 접근시설 유지보수공사

나. 공사기간 : 2019.02.22. ∼ 12.31.

다. 계약금액 : 803,918,100원

라. 계 약 자 : 에스큐엔지니어링㈜   대표 이래철

마. 설계변경 사유서 : 실정보고 승인 및 작업지시(완료) 보고반영

구 분	2회			비 고
	당 초	변 경	증·감
총공사비	803,918,100	933,918,100	증 130,000,000
도 급 비	797,254,100	927,254,100	증 130,000,000
이 전 비	6,664,000	6,664,000	-

사. 예산과목

- 한강공원관리 및 운영, 한강공원시설관리 및 개선, 한강공원접근시설유지관리, 시설비(시비)

첨부 :  1. 설계변경 내역서(2회) 1부.

2. 설계변경 사유서(요약) 1부.

3. 설계변경 자문위원회 심의결과. 끝.

	시설부장
주무관	김동식		치수과장	손창열		시설부장	09/02 전영주
협조자	주무관	김경화		기획예산과장	문영일		총무과장	한정훈
시행	치수과-2999	(		)	접수		(		)
우	04770	서울시 성동구 강변북로 257(성수동1가 642-25)	/
전화	02-3780-0687	/전송	02-3780-0744	/		/	부분공개(6)