문서번호	운영과-6338
결재일자	2019.9.3.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		운영과장	중랑물재생센터소장
이창하		최영효	09/03 이성재
협조
	관리과장		代유화열

중랑물재생센터

작업공간 등 근무환경개선 계획보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 9.

중랑물재생센터

(운영과)

중랑물재생센터 작업공간 등 근무환경 개선계획 보고

물재생시설과에서 『센터 운영자대기실 및 작업공간 근무환경개선을 위한 용역시행』통보 관련 우리센터는 현대화(2단계)에 의한 대상시설의 이전 및 철거계획으로 전체 용역시행 곤란에 따른 개선계획을 보고 드림

Ⅰ		배 경

○ “물재생센터 운영자 대기실 및 작업공간 등” 근무환경개선계획

물재생시설과-4991(2019.04.09.)

농축기, 위생처리장, 탈수시설 등 소음, 악취발생 시설에 대한 센터별 근무환경 개선을 위한 설계용역을 시행(’19년 용역, ’20~’21년 개선사업 시행)

○ 중랑센터는 2단계 현대화계획으로 분뇨처리시설, 농축, 소화, 탈수시설 등 많은 시설이 철거 이전 설치계획으로 대상시설 전체에 대한 용역시행 곤란

Ⅱ		당초계획

○ 용역대상 : 각 센터 운영실 및 악취․소음발생 작업장

○ 용역금액 : 1억원

○ 예산과목 : 자본적지출, 유형자산취득, 기계장치, 시설비및부대비, 시설비

○ 재배정조건 : 발주․계약 및 용역완료 추진

Ⅲ		문제점

□ 중랑 시설현대화 2단계사업 추진관련

○ 중랑물재생센터 2단계 추진계획(안)에 분뇨처리시설, 농축, 소화, 탈수, 건조처리시설 및 유입동 등의 이전 시설계획(’20~’25년)

○ 따라서 당초 중랑센터 근무환경 대상시설인 슬러지처리 시설 대부분 시설이 수년내로 철거 및 이전대상으로 설계 용역후 시설개선 곤란

Ⅳ		추진계획

□ 근무환경 열악한 시설중 개선시급 작업장(슬러지처리) 우선 개선

○ 농축기동 유입저류조 송풍기, 교반펌프 소음방지 설비 개선

○ 분뇨처리동 투입구 악취개선

○ 기존 건조시설 기계실  급기팬 설치로 악취개선 개선 등

○ 대상시설에 대한 설계용역(소액) 후 용역비 잔여예산(시설비)로 금년 조속 시설개선

Ⅴ		향후계획

○ 건설기술용역 타당성심사 및 용역계약(’19.9월)

○ 용역준공 및 대상사업 발주(’19.10월)

○ 대상시설 공사완료(’19.12월). 끝.