설계변경 심의 의견서

부분공개(5)

1. 공사명 : 강북아리수정수센터 4계열 응집침전지 보수공사

신청부서명	정수시설과
작 성 자	김 수 영
제출년월일	2019. 9. 3.

2. 심의 위원회 의견

- 심의일시 : 2019.  9. 3.(화) 10:00

- 심의의견 : 설계변경에 따른 심의 결과에 대하여

아래와 같이 의견을 제시함.

위   원

직  위

성  명

서  명

의  견

위    원

정수시설과장

백상희

09/04

백상희

타당함

위    원

주무관

임근식

임근식

타당함

위    원

주무관

함인석

함인석

적정함

위    원

주무관

고형남

고형남

타당함

위    원

주무관

전고운

전고운

적정함

담    당

★주무관

김수영

김수영

타당함

설계변경 사유서

□ 공사개요

❍ 공 사 명: 강북아리수정수센터 4계열 응집침전지 보수공사

❍ 공사기간: 2019. 5. 1. ~ 2019.11.16.

❍ 공사개요: 응집침전지 보수 4,981㎡, 트라프 보수 772㎡

❍ 계약금액: 금841,553,400원

❍ 계약업체: ㈜에이스케미콘 대표 강병숙

□ 설계변경 내용 및 사유

❍ 효율적인 아리수 생산관리 및 하자관리를 위한 트라프 1개소, 정류실 1개소 추가 보수 시행에 따른 물량 증가

‣ 사유 :

- 예산부족으로 보수대상에서 제외된 트라프 1개소 및 정유실 1개소 보수작업을 별도 시행 시 약 20일 침전지 생산 중단 및 지별 하자관리에 어려움이 있어 효율적인 관리를 위하여 진행중인 사업에 반영하여 시행

- 근거 : 4계열 응집침전지 보수공사 공사현장 실정보고〔정수시설과-2752(‘19.8.9.)〕

‣ 시공수량 증가 공종 :

- 고압물세척, 세라믹코트 도포, 그라인딩, 분라프라이머 미장, 단면복구, 균열보수, 수밀코킹

❍ 응집지(4-3지) 정류별 상부 PDF판넬 시공으로 신규 공종 발생

‣ 사유 : 노후·열화로 콘크리트 균열, 박리·박락된 정류벽 상부를 내구성 및 보수공사의 효율성을 감안하여 PDF판넬로 시공

- 근거 : 4계열 응집침전지 보수공사 공사현장 실정보고〔정수시설과-1997(‘19.6.18.)〕

‣ 신규 공종 : PDF판넬 월류벽 설치

❍ 건강·연금·노인장기요양보험료 정산 시행

‣ 사유 : 계약자가 보험료 미납으로 감액조정

❍ 법령에 의한 기타 제경비 산정 및 사용금액 정산에 따라 증감 발생

‣ 증가 제경비 : 간접노무비, 산재보험료, 고용보험료, 기타경비, 일반관리비

‣ 감소 제경비 : 퇴직공제부금비, 건설기계대여급지급보증금, 산업안전보건관리비, 환경보전비, 이윤

❍ 시공수량 변동

공 종	규 격	단위	당 초	변 경	증 감	비 고
고압물청소	고압세척기	㎡	5,753	6,295	증542
그라인딩	SAW(100mm*1.7)	㎡	772	1,158	증386
분말프라이머 미장	벽체, 3.6이하	㎡	4,111	4,847	증736
분말프라이머 미장	벽체, 3.6초과	㎡	870	869	감1
단면복구	벽체(t=10mm), 3.6이하	㎡	4,111	4,268	증157
단면복구	벽체(t=10mm), 3.6초과	㎡	870	869	감1
세라믹코트 도포	하도 1회	㎡	5,753	6,295	증542
세라믹코트 도포	상도 2회	㎡	5,753	6,295	증542
균열보수	습식	m	10	253	증243
무근콘크리트 깨기	소형브레이커	㎥	-	1	증1	신규
수밀코킹	2액폴리우레탄계	m	453	680	증227
PDF판넬 월류벽 설치	15.6B*0.3H(HDPE,T=65㎜)	개	-	1	증1	신규

❍ 건강·연금·노인장기요양보험료, 산업안전보건관리비 등 정산 시행

공 종	규 격	단위	당 초	변 경	증 감	비 고
건강․연금․노인장기요양보험료		원	19,745,997	-	감19,745,997	미납
퇴직공제부금비		원	5,673,518	1,645,000	감4,028,518	납부금액 감소
건설기계대여금지급보증서 발급금액		원	2,648,410	-	감2,648,410	미 가입
산업안전보건관리비		원	17,054,021	10,014,000	감7,040,021	사용액 감소
환경보전비		원	3,152,643	2,400,000	감752,643	사용액 감소

❍ 설계변경 금액(변동 있음)

구 분		금 액		증·감	비 고
		당 초	변 경
총 공 사 비		841,553,400	864,850,000	증23,296,600	물량증가
도급비	공급가액	765,048,546	786,227,273	증21,178,727
	부가세	76,504,854	78,622,727	증2,117,873
	계	841,553,400	864,850,000	증23,296,600

붙 임 : 설계변경 내역서 1부.  끝.