문서번호	기전과-9776
결재일자	2019.9.4.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장
노민영		09/04 代정영술
협 조

2019년 중앙버스전용차로 흐름개선

교통신호기 공사(서부지원 앞)

실정 보고 사항 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 9.

서부도로사업소

(기 전 과)

2019년 중앙버스전용차로 흐름개선

교통신호기 공사(국립극단 앞)

실정 보고 사항 검토 보고

2019년 중앙버스전용차로 흐름개선 교통신호기 공사(서부지원 앞) 시행 중 감리 업체에서 제출한 실정 보고 건에 대해 내용 검토 후 그 결과를 보고하고자 함.

□ 관련근거

○ 감리업체 실정 보고 제출

- 태영 2019(신)-73(2019.09.04.)

□ 공사개요

○ 공 사 명: 2019년 중앙버스전용차로 흐름개선 교통신호기 공사(서부지원 앞)

○ 공사위치: 서울특별시 마포구 마포대로 서부지원 앞

○ 공사내용: 신호등, 지주, 신호케이블 신설 등

○ 계약금액: *******************************

○ 계 약 일: 2019. 7. 19.

○ 공사기간: 2019. 7. 24. ~ 2019. 9. 21.

○ 계약업체: ******************

○ 감리업체: ㈜태영알앤디

□ 실정보고 내용

○ 변경 예상 금액: *************

(단위: 원)

구 분	변 경 전	변 경 후	증 · 감
공 급 가 액	42,432,888	44,200,000	증) 1,767,112
부 가 가 치 세	4,243,288	4,420,000	증) 176,712
도 급 비	46,676,176	48,620,000	증) 1,943,824

○ 세부내역

- 서부지원 앞: *************

- 주요 변경 내용

시공(공종 및 물량) 내용	규 격	구 분	단 위	수 량
				당초	변경	증·감
신호 현시 변경 D/B입력	D/B입력 및 현장과 센터간 시험	신설	식	0	1	1
차량신호등 설치	LED, 1면4색(사급) 1조	철거	조	1	0	1
차량신호등 설치	LED, 1면3색(사급) 1조	신설	조	0	1	1
차량신호등 철거	LED, 1면2,3,4색 1조	이설	조	1	2	1
디자인지주(외날개/통합)	∅300mm×8.5M	이설	본	1	0	1
디자인지주(외날개)	∅300mm×8.5M	이설	본	0	1	1
케이블 고재(신호선)	1선F-CVV 2.5SQ×5C	이설	m	77	140	63
케이블 고재(신호선)	2선F-CVV 2.5SQ×5C	이설	m	133	0	133
케이블 고재(신호선)	3선F-CVV 2.5SQ×5C	이설	m	5	0	5
케이블 고재(신호선)	4선F-CVV 2.5SQ×5C	이설	m	0	133	133
케이블 고재(신호선)	6선F-CVV 2.5SQ×5C	신설	m	0	5	5
신호케이블	지중1선F-CVV, 1.5SQ/5C	신설	m	65	110	45
신호케이블	지중3선F-CVV, 1.5SQ/5C	철거	m	156	0	156
신호케이블	지중5선F-CVV, 1.5SQ/5C	철거	m	5	164	159
신호케이블	지중7선F-CVV, 1.5SQ/5C	고재	m	0	5	5
신호케이블	가공2선F-CVV, 1.5SQ/5C	신설	m	26	31	5
전선관 배관	PE ∅54mm 1열	신설	m	33	0	33
전선관 배관	PE ∅100mm 2열	신설	m	22	30	8
소형고압블럭 굴착 배관	B=1.2M, 1-2열 배관	신설	m	23	30	7
가로등주	10M - 12M	철거	본	1	0	1
가로등주 기초 제거	가로등주 10m 이하	철거	EA	1	0	1

□ 조치의견

○ 감리업체에서 제출한 실정 보고 사항 검토 결과 그 내용이 타당하여, 감리업체에 실정 보고 내용에 따라 작업 시행토록 지시하고 추후 정산하고자 함.

붙임  감리 업체 실정보고서 1부.  끝.