출 장 결 과 보 고

결재	주무관	토목심사1팀장	계약심사과장
	허원도	윤병헌	09/03 김수정

	명에 의하여‘항동공공주택지구 조성공사 설계변경’계약심사를 위하여 현장에 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2019. 9. 3.(화)
보 고 자 : 직 토목6급 성명 : 허원도 외1명

보 고 내 용
일 시	2019.9.3.(화) 09:30 ~ 13:30
건 명	출장결과보고(9/3)
내용	○ 출 장 자 : 토목심사1팀장 윤병헌, 토목6급 허원도 ○ 출 장 지 : 항동공공주택지구 조성공사 현장(구로구 관내) ○ 출장목적 : 설계변경 계약심사를 위한 현장조사 ○ 출장내용 : 항동공공주텍지구 조성공사 3회 설계변경 계약심사관련 우선시공 확인 등 업무협의 - 제3회 설계변경 실정보고 건에 대한 우선시공 확인결과 대부분의 공사가 우선 시공 완료한 상태임(공정율 98.5%). - 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준 제3장 제5절 1항 바항에 의거 사업부서에서 이미 계약상대자와 협의하여 우선 시공을 한 설계변경으로 설계변경심사의 실효성이 없으므로 심사제외 통보코자 함. 첨부 : 설계변경(제3회) 추진현황 및 사진대지 각1부. 끝.
비 고	관용차량 사용여부 : 미사용