＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	남부수도사업소
수신자	행정지원과장
(경유)
제 목	계약의뢰 (낙성대5중블록 외 1개소 무단수급수체계 구축공사)

우리사업소에서 시행중인 『낙성대5중블록 외 1개소 무단수급수체계 구축공사』에 대하여 공사를 완료하고 아래와 같이 설계변경을 시행코자 합니다.

가. 공 사 명 : 낙성대5중블록 외 1개소 무단수급수체계 구축공사

나. 계 약 자 : **********

다. 공사기간 : 2019. 4. 15. ~ 2019. 10. 14.

라. 공사개요 : D=100~700㎜, L=894m

마. 설계변경 내역

구 분	금 액		증 ․ 감	비 고
	당 초	변 경
공급가액	***********	***********	***********
부가가치세	**********	**********	**********
도 급 비	***********	***********	***********	********

바. 설계변경 사유 : 현장 시공여건 변화로 인한 신규공종 및 공종별 물량 증,감

확인굴착개소 추가 및 부단수차단 토공 반영 등

사. 예산과목 : 자본적지출,유형자산취득,구축물,시설비 및 부대비,시설비(중블록별무단수급수체계구축)

붙임  1. 시설공단 설계변경 검토서류 각 1부.

2. 설계변경내역서 1부.

3. 설계변경 심의의결서 및 합의서 1부.

4. 검증확인서 및 산업안전보건비검토서 1부.

5. 설계변경 시행문 1부.  끝.

	급수운영과장
주무관	송현우		급수설비팀장	서규석		급수운영과장	09/04 이성환
협조자
시행	급수운영과-16836	(		)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로10길 97 (신대방동) 남부수도사업소 3층 급수운영과	/
전화	02-3146-4557	/전송	02-3146-4589	/	orange5153@seoul.go.kr	/	부분공개(5)