문서번호	뉴미디어담당관-8950
결재일자	2019.9.4.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	홈페이지팀장	뉴미디어담당관
서은지	전성권	09/04 이종선

「2019년 서울시 정보접근성 실태조사 및 품질인증 용역」

월간업무보고(8월)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 9.

시민소통기획관

(뉴미디어담당관)

「2019년 서울시 정보접근성 실태조사 및 품질인증 용역」

월 간 업 무 보 고 (8월)

「2019년 서울시 정보접근성 실태조사 및 품질인증 용역」사업의 월간

추진실적 및 차월 계획을 보고함

□ 사업개요

○ 사 업 명 : 2019년 서울시 정보접근성 실태조사 및 품질인증

○ 추진근거

- 서울특별시 정보취약계층 정보접근성 향상을 위한 조례(’19.7.18.)

- 2019년 서울시 정보접근성 실태조사 및 품질인증 용역 계획(정보시스템담당관-7520,’19.5.15.)

○ 사업기간 : 2019. 6. 19.~ 12. 18. (6개월)

○ 사업내용 : 시 및 투자출연기관 운영 웹 및 앱 정보접근성 실태조사 및 품질인증

□ 추진실적

○ 추진기간 : 2019. 8. 1. ~ 8. 31.(8월)

○ 추진기간 : 계획(38.5%)/실적(38.5%)

○ 추진내용

구분		합계	실태조사		품질인증
			웹	앱	신규	갱신
조사대상(당초)		159	81	29	8	41
조사대상(변경)		147	72	29	8	38
추진실적	금월	30	19	7	(2)	4
	누계	44	28	10	(2)	6
진척율		27.7%	34.6%	34.5%	0%	14.6%

※ 품질인증은 최종 마크 취득한 갱신(4개)만 진척율에 포함, 신규(2개)는 진행 중

□ 주요실적

○ 정보접근성 실태조사 추진 (PC웹 19건, 앱 7건)

- PC 웹접근성 실태조사 결과

연번	사이트명	PC 웹접근성 실태조사
		전문가	전맹	저시력	뇌병변
1	온라인여론조사	77.14	X	○	X
2	자원회수시설	68.3	○	○	○
3	서울종합방재센터	69.9	○	○	○
4	서울역사편찬원자료실	90.4	○	○	○
5	인터넷원서접수	74.9	○	○	○
6	공공서비스예약	93.6	○	○	○
7	3차원 공간정보시스템	82.31	○	○	○
8	도로명주소시스템	78.6	○	○	○
9	서울우수공공디자인 인증제	32.1	X	○	○
10	재활용나눔장터	70.5	X	○	X
11	평생학습포털	77.2	X	○	○
12	공동주택 통합정보마당	87.28	○	○	○
13	주민참여예산	77.33	○	○	○
14	서울특별시 햇빛지도	76.63	○	○	○
15	주차정보안내시스템	80.5	○	○	○
16	서울천만인소	82.04	○	○	○
17	서울안전누리	80.53	○	○	○
18	실내환경관리시스템	58.57	○	○	○
19	한양도성	84.2	X	○	X

- 모바일 앱접근성 실태조사 결과

연번	모바일앱	Android				iOS
		전문가	전맹	저시력	뇌병변	전문가	전맹	저시력	뇌병변
1	서울시평생학습포털	88.2	○	○	○	86.6	○	○	○
2	My Seoul	73.4	○	○	○	69.8	○	○	○
3	서울교통포털	75.6	○	○	○	75.6	○	○	○
4	서울주차정보	75.8	X	○	○	78	X	○	○
5	서울특별시	84.6	○	○	○	80.4	○	○	○
6	서울 일자리포털	77.4	○	○	○	93.4	○	○	○
7	서울자전거 따릉이	75.4	X	○	○	72.2	X	○	○

○ 웹 접근성 품질인증 (신규 2건)

- 소셜시장실(리뉴얼 오픈 후 재평가 예정), 승용차요일제(2차 평가 진행 중)

○ 웹 접근성 품질인증 (갱신 4건)

- 시립미술관(‘19.8.17.), 일자리포털(’19.9.14.), 서울광장(‘19.9.26.), 아동복지센터(’19.10.19.)

※ 품질인증 기준일은 한국정보화진흥원 인증서 신고일 기준

○ 웹 실태조사 보고서(19부), 앱 실태조사 보고서(7부) 부서전달

□ 차월계획

○ 웹접근성(22건), 앱접근성(6건) 실태조사

연번	사이트명	심사일정	연번	사이트명	심사일정
1	부동산일사편리	9/2-6	1	내 손안에 서울	9/2-6
2	생활권계획	9/2-6	2	엔젤아이즈 도우미	9/2-6
3	상생교류협력	9/2-6	3	서울시 안심이	9/2-6
4	스마트서울맵	9/2-6	4	서울시민카드	9/9-13
5	서울모바일플랫폼	9/2-6	5	서울안전	9/16-20
6	시민건강포인트	9/9-13	6	모바일 아리수	9/23-27
7	서울실내지도서비스	9/9-13
8	집합건물통합정보마당	9/9-13
9	서울사진아카이브	9/9-13
10	서울재정포털	9/9-13
11	집수리닷컴	9/9-13
12	서울 박물관미술관	9/16-20
13	서울 공공프로젝트 설계공모	9/16-20
14	빅데이터 캠퍼스	9/16-20
15	서울역사편찬원	9/16-20
16	디자인거버넌스	9/16-20
17	라이브서울	9/23-27
18	서울사랑	9/23-27
19	열린데이터광장	9/23-27
20	국제교류복합지구	9/23-27
21	서울기업지원센터	9/23-27
22	서울스마트불편신고	9/23-27

○ 웹접근성 신규(2건), 갱신(11건) 품질인증

연번	사이트명	심사일정	연번	사이트명	심사일정
1	소셜시장실	오픈시	1	상수도사업본부 (영어)	9/2-6
2	승용차요일제	2차 진행	2	전자상거래센터	9/2-6
			3	법무행정서비스	9/2-6
			4	수도박물관	9/16-20
			5	한성백제박물관	9/16-20
			6	도농상생 공공급식	9/16-20
			7	서북병원	9/16-20
			8	어린이병원	9/23-27
			9	한강사업본부	9/23-27
			10	미래유산	9/23-27
			11	민주주의 서울	9/23-27

붙임 1. 월간업무보고서(8월) 1부.

2. 월간실적보고서(8월) 1부.

3. 주간업무보고서(8월) 5부.

4. 주간실적보고서(8월) 5부.  끝.