문서번호	역사문화재과-16549
결재일자	2019.9.5.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
소장	주무관	역사문화재과장
황정로	차미래	09/05 정영준

남산골 한옥마을 정문화장실 증축 및 리모델링공사

설계변경 검토보고

2019. 9.

문 화 본 부

(역사문화재과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■

남산골한옥마을 정문화장실 증축 및 리모델링공사 설계변경 검토보고

우리시와 계약체결하여 시행중인 “남산골 한옥마을 정문화장실 증축 및 리모델링공사”과 관련 오래되고 작동이 잘되지 않는 출입구 자동문 등 교체 및 현장여건에 따른 실시공 물량증감 등의 설계변경 사항이 발생하여 검토보고 함.

Ⅰ 사업개요

□  공 사 명 : 남산골 한옥마을 정문화장실 증축 및 리모델링공사

□  공사기간 : 2019. 6. 17~2019. 9.14

□  도 급 비 : **********************

□  공사내용 : 화장실 증축 25.2㎡ 및 기존화장실 리모델링 1식

□  계 약 자 : *******************

Ⅱ 설계변경 내용

□  주요변경내역 검토 결과

구분	공종	규격	수량		비고
			당초	변경
청호공	출입구자동도어 (양문)	3590*2520	0개	1개	출입구 등 자동도어가 오래되어 작동 잘되지 않아 교체
	장애인자동도어 (남여)	1750*2400	0개	2개
	소대유리	800*2100	0장	2장
		420*2400	0장	2장
리모델링공	타일	300*300*9압5m	54,47㎡	67.92㎡	출입구앞 기존타일 교체
기타	보험료 및 환경보전비 정산				보험료정산 및 환경보전비 정산

□  변경사유 : 출입구앞 존치예정인 타일이 새로 설치된 타일과 어울리지 않아           같은 타일로 교체 및 오래되고 작동이 잘 되지 않는 자동출입문           교체 및 현장여건에 따른 실시공 물량 증감사항 반영 등

Ⅲ 도급비 : *************************

******************************************

Ⅳ 보고자 의견

□  오래되어 작동 되지 않는 출입구 및 장애인 자동도어 교체 및 현장 여건        변화에 따른 실시공 물량증감 사항 반영 등 변경사항에 대하여 본 공사의       설계공사비 범위(낙찰차액)내에서 설계변경하여 사업 추진에 만전을 기하고자 함

붙임  1. 변경내역서 및 도면 각1부.

2. 현황사진 1부.  끝.