문서번호	총무과-13042
결재일자	2019.9.6.
공개여부	부분공개(5 7)
방침번호

				시 민
★주무관	총무과장	총무부장
이일순	한정훈	09/06 기봉호
협 조	주무관		장연심
	주무관		조강민

「뚝섬안내센터 리모델링공사」 기성 검사 및 기성금 정산 계획

2019. 09.

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	□
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	□
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	□
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	□
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	□
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	□	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	□

「뚝섬안내센터 리모델링공사」

기성 검사 및 기성금 정산 계획

뚝섬안내센터 리모델링 공사계약 해지와 관련하여 현장 실측에 의해 작성 된 도서 및 내역서를 기준으로 기성 검사를 실시하고 기성금을 정산하고자 함.

Ⅰ		추진근거

□ 뚝섬안내센터 리모델링공사 공사지연 및 계약해지 검토 보고

(총무과-9060호, 2019.06.28.)

□ 뚝섬안내센터 리모델링 공사 준공도서 및 내역서 작성 계획

(총무과-12092호, 2019.08.22.)

Ⅱ		공사개요 및 추진경위

□ 공사 개요

❍ 위치 : 광진구 강변북로 139

❍ 규모 : 지하1층 지상3층 연면적 632.90㎡ RC조

❍ 공사 내용 : 에너지 제로화 구축 및 내진성능 보강

❍ 도급자 : **********************

❍ 공사비                                                    (단위 : 원)

(건축·기계) 공사비	선 급 금	잔 금
***********	***********	***********

□ 추진 경위

❍ 2017.11.21.  공사 계약 및 착공 (공사기간 : 2017.11.21.~2018.05.19.)

❍ 2018.05.21.  준공 검사원 제출

❍ 2018.05.29. / 06.01 / 07.05 / 07.18

- 준공검사 관련 시정지시(촉구) 및 보완(촉구) 통보

❍ 2018.07.03.  안내센터 이사

※ 마감공사가 완료되지 않았으나, 사용에 지장이 없는 상태로 안내센터 복귀함.

❍ 2018.07.12. ~ 2019.05.17. 전부금 청구 쟁송

(원고 : **** 피고 : 한강사업본부 / 원고 소 취하)

❍ 2019.05.10.  공사 이행 및 관계 서류 제출 촉구 ************

❍ 2019.05.16.  준공계 및 준공검사원 제출 ************

❍ 2019.05.17.  소 취하 확정

❍ 2019.05.21.  준공계 및 준공검사원 제출에 대한 회신 ************

→ 공사 완료 및 준공검사 관계 서류 일체 제출 촉구

❍ 2019.06.10.  공사포기서 제출 ************

❍ 2019.07.02.  계약해지 통보 및 계약보증금 등 세입조치 안내 ************

❍ 2019.08.09.  계약보증금 세입 조치

Ⅲ		타절 준공 검사

□ 검사 개요

❍ 공사 계약 해지에 따라 기성부분에 대한 도서 및 내역서를 작성하고 이를 기준으로 타절준공검사를 실시하고자 함.

□ 검사일 : 2019.09.09. (월) 14:00

□ 검사장소 : 뚝섬안내센터

□ 입회자 : ************

********************

※ 대표 및 그 위임을 받은 자 (위임장 및 인감증명서 지참)

□ 검사내용 : 계약해지 시점까지의 기성 확인

□ 정산 내역

❍ 타절 정산 산출금액 현황                                     (단위 : 원)

계약금액	타절정산금액	선급금	잔금	정산차액 (계약-타절)
***********	***********	***********	***********	**********

❍ 공사비 정산 주요 내역

- 미시공으로 물량 감소 (돌공사, 타일공사, 조경공사 등)

- 창호의 크기, 위치 변경 등

Ⅲ		향후 계획

□ 2019.09. : 타절준공 및 정산

□ 2019.09. : 부정당업체 제재

□ 2019.10. : 계약해지에 따른 미시공 물량분 공사 계약

첨부  1. 현장 실측 도면 1부.

2. 정산 내역서 1부.  끝.