문서번호	토목부-16144
결재일자	2019.9.5.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	토목설계과장	토목부장		시설국장
김종혁	김동현	김용제		09/05 김승원
협 조

설계용역 착수보고회 개최 결과 보고

[서부간선도로 일반도로화 및 친환경공간 조성 실시설계]

2019. 9.

도시기반시설본부

토목부

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

설계용역 착수보고회 개최결과 보고

[서부간선도로 일반도로화 및 친환경공간 조성 실시설계용역]

서부간선지하도로 건설과 연계하여 기존 서부간선도로를 일반도로화하고 차로수 및 차로폭 축소 후 녹지, 보도 및 자전거도로, 커뮤니티시설 등 친환경 공간 조성을 위해 추진하는 “서부간선도로 일반도로화 및 친환경공간 조성 실시설계용역”에 대한 착수보고회 개최 결과를 보고드림

1	사업개요

○ 사 업 명 : 서부간선도로 일반도로화 및 친환경공간 조성 실시설계

○ 규    모 : 왕복 4차로, 연장 8.1km, 친환경공간 조성 119천㎡

○ 설계기간 : '19.7.16. ~ '20.11.15.

○ 총사업비 : 85,950백만원 (실시설계비 : 2,141백만원)

○ 설 계 사 : ㈜유신,㈜도화엔지니어링,㈜경동엔지니어링,㈜진우엔지니어링코리아, ㈜도진엔지니어링

○ 위 치 도

2	추진경위

○ '16.06.03.	: 서남부지역 발전을 위한 서부간선도로 지하화 추진계획 검토 보고

○ '13.09. ~ ’15.02. : 타당성 조사 및 기본계획

○ '15.10.28.	: 투자심사 완료

○ '16.05. ~ '19.03. : 기본설계 용역 시행

○ '18.08.26.	: 2단계 투자심사

○ '18.12.04.~12.06.: 주민설명회 (영등포구, 구로구, 금천구)

○ '19.03.29.	: 기본설계용역 추진 완료 보고

○ '19.07.16.	: 실시설계용역 착수

3	착수보고회 개최 결과

○ 안  건 : 서부간선도로 일반도로화 및 친환경공간 조성 실시설계용역

***********2019. 8.30.(금) 10:00~11:00

****장  소 : 도시기반시설본부 11층 대회의실

****참석자

- 내부 : 시설국장, 토목부장, 토목설계과장, 도로계획과 민자사업팀 담당, 공공개발기획단 복합개발팀 담당, 분야별(조경) 담당자

- 외부 : 금천구 도로계획과장, 영등포구 도로계획팀장, 구로구 도로과(별도 의견 공문 제출)

****보고자 : 용역사업책임자(㈜유신 심재만 전무이사), 분야별 설계책임자 5인

****주요 착수 보고 내용

- 시설국장 : 서부간선도로 일반도로화 및 친환경공간 실시설계용역의 실시설계를 바로 수행하지 말고 공공개발기획단의 유휴부지 활용방안과 상호 검토하여 조정하는 것이 필요

- 토목부장

1) 공공개발계획단의 유휴부지 활용계획을 충분히 고려할 것

2) 평면교차로에 횡단보도 설치시 기존 육교 철거방안은 구청과 사전협의 철저

- 금 천 구

1) 광명대교 구간은 상습 정체 지점이므로 평면교차로 계획시 유의 바람

2) 공단지역이 위치한 곳은 특성에 맞게 친환경공간 조성

3) 금천구 지역은 경부선 철도와 서부간선도로로 단절된 공간적 개념을 지닌 곳이므로 친환경 공간 조성시 해당 지역의 특성을 반영토록 요청

4) 금천교에서 G-밸리 방면으로 연결로가 없으므로 당해 설계용역시 검토

5) 친환경공간 조성시 미세먼지 저감가능한 시설 계획 반영

- 영등포구

1) 서부간선지하도로 출구부의 방음벽 등 대책 요청

2) 양평동쪽은 주거지역과 친환경공간이 인접해 있으므로 친환경공간 조성에 따른 방음효과 기대할 수 없으므로 방음벽 등 대책 마련

3) 자동차전용도로→일반도로로 전환시 교통사고의 위험을 감안하여 중앙선을 간이중앙분리대 등으로 설치 검토

4) 안양천으로의 안전한 접근을 위해 육교 철거를 반대하며 평면교차로 설치시 육교를 무조건 철거하지 말고 주민의견 수렴을 충분히 한 후 철거 검토

- 구로구 (서면 의견)

1) 유휴부지내 구로구 주민요구시설(도서관 등) 설치

2) 친환경공간은 도시계획시설(공원, 녹지)로 결정하여 부족한 공원녹지 확보

3) 자전거도로, 보도변에는 띠녹지를 조성하고 가로수 식재

4) 가로수, 띠녹지 등 녹지공간은 우수관리체계 (침투수 활용 등) 도입

5) 신규 조성되는 옹벽 등 구조물 벽면은 녹화하여 도시열섬 완화

6) 유지관리의 편의성을 고려한 조경시설물 도입 등 조경계획 수립

7) 각종 공해 및 소음에 강하고 미세먼지 차단에 효과적인 수종 도입

8) 친환경공간 내 공원등 및 CCTV 설치가 반영될 수 있도록 조치

- 방재시설부(조경)

1) 향후 준공 이후 친환경공간 유지관리는 구청에서 시행하므로 실시설계시 녹지 계획은 구청과 사전에 충분히 협의하여 계획

4	향후 추진계획

○ 기본설계시 주민설명회 결과 등을 반영하여 노선계획 변경

- 자전거도로 양측→편측 변경으로 도로 중심선 변경 필요

○ 공공개발기획단의 유휴부지 활용계획에 대해 검토 후 실시설계 추진 검토

○ 관계기관(자치구 등)의 의견을 실시설계에 검토 후 반영

○ 향후 일정계획

- '19.10. ~ '19.12. : 관계기관 협의

- '20.05.     : 실시설계 기술심의

- '19.11.15. : 실시설계 완료.  끝.