문서번호	시설관리과-21599
결재일자	2019.9.9.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	주무관	시설관리과장
홍민표	김대용	09/09 천성훈
협 조
	기전팀장		정인주
	주무관		최지훈

무단수 급수체계 구축사업

용마1중블록 유량계실(DBM-6) 신설 계획

2019. 9.

동부수도사업소

시설관리과

2019년 무단수 급수체계 구축사업 추진계획과 관련 구역 유량계 및 실 신설 설치 공사를 아래와 같이 보고합니다.

보고자: 시설주사보  홍 민 표

○ 관련근거

- 비기본계획 승인(환경부)

· 상수관망 최적화, 무단수 공급체계 구축, 지능형 상수관망 체계 도입

- 17.05.18: 무단수 급수체계 구축 사업 추진 계획(본부장 방침)

- 18.12.31: 2019년 무단수 급수체계 구축 사업 추진계획(본부 배수과)

○ 추진목적

- 상수도관망 블록시스템 구축과 주요관로 복선화를 통한 비상연결 네트워크         구축으로 누수발생 및 돌발사고 등 비상시에도 365일 중단 없는 안정적 급수        공급을 위함.

○ 무단수 급수체계 구축 대상: 용마 1중블록

- 증블록 유량계 D=700mm 신설

○ 무단수 급수체계 구축 작업계획

- 공사위치: 중랑구 면목동 1502

- 공사개요 및 사업비

· 공사개요: 유량계 및 유량계실(D700mm), 유량계 전송반 및 전송선로 설치

· 사 업 비: 3,900만원[시설물공사 1,500만원, 유량계(기전) 2,400만원]

구분	계	유량계	유량계실	유량계 전송선로
시설물	D700mm N=2개소	D=700mm N=1개소	D=700mm N=1개소	전송반 및 전송선로
사업비	3,900만원	1,300만원	1,500만원	1,100만원
비고		기전팀	지역 담당 (유량계실 규격 참조)	기전팀

- 공사기간: 2019. 9월 ~ 11월(3개월)

○ 공사 시행

- 시설물공사

· 용마 1중블록 유량계실 DBM-6(미고립) 설치는『2019년 망우본동외 8개동

상수도공사』계약업체로 하여금 시공토록 작업지시하고 추후 설계변경시 반영

- 초음파유량계 등 기전설비공사

· 용마 1중블록 초음파 유량계 DBM-6(미고립), 전송반 및 전송선로 매설 설치는 기전팀에서 시행

- 상기 공사에 대하여 현재 위탁 건설사업관리 업체인 “㈜이준엔지니어링”으로 하여금 감독토록 조치하여 안전관리에 만전을 기하고자 합니다.

붙임  2019년 무단수 급수체계 구축 사업 추진계획 방침서. 끝.