투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서부도로사업소
수신	관리단속과장
(경유)
제목	설계 변경 시행[2019년 중앙버스전용차로 흐름개선 교통신호기 공사(서부지원 앞)]

1. 기전과-9877(2019.9.8.)호와 관련입니다.

2. 2019년 중앙버스전용차로 흐름개선 교통신호기 공사(서부지원 앞)에 대하여 아래와 같이 변경 계약을 의뢰하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명: 2019년 중앙버스전용차로 흐름개선 교통신호기 공사(서부지원 앞)

나. 공사기간: 2019. 7. 24. ~ 2019. 9. 21.

다. 계약업체: ******************

라. 계약금액: *******************************

마. 변경금액: ************************

바. 설계 변경 내역                                              (단위: 원)

구 분		변 경 전	변 경 후	증 · 감
총 공 사 비		**********	**********	************
도급비	공 급 가 액	**********	**********	************
	부 가 가 치 세	*********	*********	***********
	계	**********	**********	************

사. 설계 변경 사유

- 현장 여건상 굴착 물량 변경에 따른 신호 케이블 등 변경 물량 반영

- 가로 등주 통합 물량 제외 물량 반영

- 기타 부대 공종 물량 증감 반영

아. 예산과목: 도시교통실 교통운영과, 도시교통 체계 및 소통 개선,

버스서비스 이용제고, 중앙버스전용차로 흐름개선, 시설비

붙임  1. 설계 변경 보고서 1부.

2. 설계 변경 내역서 1부.

3. 합의각서 1부.

4. 계약금액조정검증확인서 1부.  끝.

	기전과장
주무관	노민영		주무관	정법관		기전과장	전결 09/09 서수일
협조자	주무관	신오기
시행	기전과-9915	(		)	접수		(		)
우	03918	마포구 가양대로 203(상암동 835)	/	http://seoul.go.kr
전화	02-300-8406	/전송	02-300-8410	/		/	부분공개(7)