문서번호	지역공동체담당관-1688
결재일자	2019.9.9.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	공동체공간조성팀장	지역공동체담당관
김현진	이준학	09/09 최순옥

노원구 거점형 마을활력소 사업계획 검토보고

2019.  9.

서울민주주의위원회

(지역공동체담당관)

노원구 거점형 마을활력소 사업계획 검토보고

마을활력소 조성·운영 사업 관련, 자치구에서 제출한 사업계획서의 집행목적 및 타당성 검토결과, 적합한 사업에 대해 예산을 집행(교부)하고자 함

1		추진개요

□ 관련근거

<조례>

○「서울특별시 마을공동체 만들기 지원 등 관한 조례」제27조(마을공간의 설치․운영)

<서울시>

○ 2020년 자치구 거점형 마을활력소 조성 지원계획 안내 (지역공동체담당관-2889, 2019.3.11.)

<자치구>

○ 노원구 거점형 마을활력소 보조금 교부 신청서 및 세부사업계획서 제출 (노원구 마을공동체과-9892, 2019.8.14.)

□ 추진배경

○ 마을공동체 활동의 지속적 활성화를 위한 구단위 거점공간(마을활력소) 조성

○ 노원구 마을자치센터가 운영주체로 참여하고, 사업이 안정적으로 추진되도록 지원

○ 지역 내 다양한 활동(육아, 북까페, 어르신일자리)를 아우르는 형태로 활력소 조성하는 한편, 공감워크숍으로 마련한 공간운영세부계획에 따라 향후 운영

	<거점형 마을활력소 공감워크숍>
주민참여단(마을자치센터, 자치구 마을부서, 공간지기, 마을지원활동가 등)을 대상으로 거점형 마을활력소의 의의와 역할, 공간설계 및 공간운영세부계획을 마련하기 위해 추진하는 워크숍

2		사업내용

□ 사업개요

○ 사 업 명 : 노원구 거점형 마을활력소(중계마을복지센터) 조성

○ 위    치 : 노원구 중계동 606-2

○ 추진기간 : 2017.11.~2020.12.

○ 시설개요 : 지하1층~지상4층(부지면적 1,402㎡, 연면적 2,987.06㎡)

구분	면적	주요시설	비고
지상4층	603.21㎡	실버까페, 교육장, 작업장, 당구장, 탁구장
지상3층	512.31㎡	부모코칭센터, 청소년성상담센터, 어르신일자리센터, 교육장
지상2층	634.04㎡	마을공동체지원센터, 커뮤니티실, 강당	거점형 마을활력소
지상1층	511.27㎡	북까페/작은도서관, 공동육아방, 아이휴센터
지하1층	726.23㎡	주차장, 기계실, 전기실, 서고 및 창고

※ 거점형 마을활력소 공간 : 1,145.31㎡

○ 총사업비 : 11,017백만원 (시비2,690, 구비6,324, 기타2,000)

○ 주요내용 : 노원구 거점형 마을활력소(중계마을복지센터)는 지하1층~지상4층 규모의 복합공간으로, 유아부터 어르신까지의 다양한 계층의 지역주민들이 상호 복합적인 커뮤니티 활동을 할 수 있는 공간으로 조성·운영

□ 운영개요

○ 운영방식 : 구직영 및 민간위탁으로 민·관 공동운영

<총괄관리> 노원구청 마을공동체과

- 거점형 마을활력소의 소유권과 시설운영 및 관리책임은 자치구에 있음

<마을활력소 운영> 노원구 마을공동체지원센터

- 주민중심의 마을공동체 형성 및 마을공간 활성화를 위해, 마을자치센터를 운영주체로 선정하며 민간위탁 방식으로 운영

<기타 입주시설> 구 직영

- 시설별 운영성격에 따라 관리부서에서 위탁방법 결정

연번	구분	운영부서
1	작은도서관/ 북까페	마을공동체과
2	공동육아방	여성가족과
3	아이휴센터	아동청소년과
4	마을공동체지원센터	마을공동체과
5	어르신일자리지원센터	어르신지원과
6	청소년성상담센터	아동청소년과
7	부모코칭센터	여성가족과
8	실버까페	어르신지원과

※ 시설별 관리부서에서 세부 공간운영계획 수립(2019.하반기 중)

○ 운영시간 : 마을활력소 운영시간 및 기타 공간 운영시간 별도 확정

<마을활력소 운영시간>

- 평일(월∼금) : 09:00 ∼ 22:00

- 토요일 : 09:00 ∼ 18:00(일요일 휴무)

※ 오후 6시 이후, 주말은 이용현황 등을 파악하여 추후 조정 가능

<기타 입주시설 운영시간>

- 부서별 세부운영계획 수립 시 확정

○ 세부 프로그램 운영계획 및 운영위원회 운영 등

- 붙임1 노원구 거점형 마을활력소 세부사업계획 참조

□ 향후일정

○ 2019. 9. 서울시비 예산교부

○ 2019. 9. 공사업체 선정 및 발주

○ 2019. 9. 명칭공모 실시

○ 2019.10. 공사 착공

○ 2020.12. 준공 및 개관

3		검토결과 및 행정사항

□ 검토내용

○ 거점형 마을활력소 조성을 위해 2019.2월 말부터 6월까지 약 4개월 간 민·관 합동 공감워크숍을 실시하여 자치구 행정과 자치구 마을자치센터의 의견을 협력적 방식으로 수렴하여 세부운영계획을 마련하였고,

○ 전체 공간 중 접근성이 가장 높은 지상 1,2층을 거점형 마을활력소로 설계한 점, 시 투자심사시 요청하였던 전체 건물에 대한 명칭도 ‘중계마을복지센터(안)’가 아닌 공모를 통해 새로이 결정하기로 계획하는 점, 또한 자치구가 일부 자체예산을 편성한 점을 고려할 때 자치구의 요청대로 예산교부가 필요함

□ 검토결과 : 보조금 교부 결정 (1개소 2,690백만원)

※ 예산과목 : (세부) 커뮤니티 공간 운영지원, (통계) 자치단체자본보조

□ 행정사항

○ 보조금 교부 통보 : 서울시(지역공동체담당관)→노원구(마을공동체과)

붙임 : 1. 노원구 거점형 마을활력소 세부사업추진계획 1부.
2. 보조금 교부 통보서 1부.  끝.