준공기한 연기보고서

결재	주무관	시설관리팀장	시설관리과장
	강철운	代권영안	09/10 김홍준

	“2019년 은평구 관내 상수도공사” 와 관련 작업지시한 아래의 급수공사건에 대하여 준공연기 보고합니다.
2019. 9. 10.
복명자 : 지방시설서기 성명 : 강 철 운

복       명       내       용

건    명

준공기한 연기보고서

내용

작업지시번호	공사위치	신청인
불용관-52	*********	***
신설-83	**********	***

1. 보고내용

- 수요가와 날짜 협의 후 공사를 요청해 옴.

2. 조치의견

- 현장여건 상 급수공사를 착수할 수 없어 상기위치의 급수공사 준공기한을 아래와 같이 연기하고자 합니다.

작업지시번호	공사위치	당초공사기간	변경공사기간
불용관-52	*********	2019.08.08.~08.19	2019.08.08.~09.30
신설-83	**********	2019.08.20.~08.30	2019.08.20.~09.30

3. 지체상금 부과여부 : 미부과

비  고

붙임  공사연기원 2부.  끝.