문서번호	급수운영과-18494
결재일자	2019.9.10.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	급수운영과장
이준규		최용진	09/10 유승효
협 조
	주무관			이한수
	주무관			정성식
	주무관			윤승구
	주무관			김재영

설계변경 심의결과 보고

(2019년 도봉구 관내 급수공사)

2019. 09.

북부수도사업소

급수운영과

설계변경 심의결과 보고

우리사업소에서 시행 중인 「2019년 도봉구 관내 급수공사(장기계속단가계약)」의 신규공종 및 시공물량 증 · 감 등으로 설계변경 사유가 발생하여 아래와 같이 설계변경 심의회를 개최하고 그 결과를 보고함.

1. 공사 개요

1) 공 사 명 : 2019년 도봉구관내 급수공사(장기계속단가계약)

2) 공사기간 : 2019. 4. 8.(착공일) ~ 2020. 6. 30.(계약일 : `19. 4. 5.)

3) 공사비 변경

구 분	금 액		증·감(원)
	당 초(원)	변 경(원)
도 급 비	***********	***********	*****

4) 도 급 자 :**************

5) 감 리 자 :*************

2. 심의회 개최현황

1) 심의일정 : 2019. 9. 10. 09:50

2) 심의장소 :  급수운영과

3) 심의위원장 : 급수운영과장

4) 심의위원 : 시설6급 김재영, 시설7급 윤승구, 시설7급 정성식, 시설7급 이한수

3. 심의 내용

1) 설계변경의 타당성(물량변동 등) 여부

2) 제경비 적정산정 및 적용의 적정성 여부

3) 부대공 및 신규공종 적정산정

4. 심의 결과

1) 설계변경의 타당성 : 타당함

2) 계약변동(증·감)물량 계약단가 낙찰률 적정 적용 여부 : 적정함

3) 제경비 적정 산정 및 적용 적정성 : 적정함

4) 각종 제반규정 준수 여부 : 준수

5. 조치 의견

위와 같이 설계변경 내역 심의결과 설계변경이 타당하고 검토항목이 적정하여 본   심의결과에 의거 설계변경 시행 및 변경계약을 의뢰코자 합니다.

첨 부 : 1) 설계변경사유서 1부.

2) 설계변경 심의 결정서 1부.

3) 설계변경내역서 1부.  끝.