문서번호	토목부-16478
결재일자	2019.9.10.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		광역도로과장	토목부장
이성열		박일연	09/10 김용제
협조

『창덕궁 앞 도성한복판 주요가로 개선사업』

관급자재(자연석판석) 구매 검토 보고

2019. 9.

도시기반시설본부

(토  목  부)

『창덕궁 앞 도성한복판 주요가로 개선사업』

관급자재(자연석판석) 구매 검토 보고

우리 본부에서 추진하고 있는『창덕궁 앞 도성한복판 주요가로 개선사업』과 관련 추가 소요되는 관급자재(자연석판석) 구매 계획에 대한 검토 보고임.

Ⅰ		공 사 개 요

공 사 명 : 창덕궁 앞 도성한복판 주요가로 개선사업

규    모 : 돈화문로 등 6개 가로개선(연장2,400m, 폭1.5~22m)

공사기간 : 2018.12.26. ～ 2019.12.31.

공 사 비 : 13,558백만원(관급 3,767백만원 포함)

Ⅱ		추 진 경 위

’18.11.30. : 공사발주(토목+조경)

’18.12.19. : 공사 계약체결

’19.05.15. : 공사중단(구청 요구사항 반영 검토)

’19.06.20. : 구청요구 내용 알림(구청→역도과)

	< 주 요 내 용 >
- 돈화문로 : 보차도 단차변경[석재포장 구간 : 10cm → 무단차, 아스콘포장 구간 20cm → 5cm], 차도 석재포장두께 변경(T150mm → T200mm) 등 - 서순라길 : 종묘 노상주차장 구간 도로선형 조정[직선→곡선, 차량속도완화], 보차도 단차 변경(20cm → 5cm)

’19.08.08. : 낙원상가, 낙원아파트 대표 주민설명회 실시

’19.08.19. : 낙원상가 하부공사 재개

’19.08.28. : 돈화문로 공사 재개

Ⅲ		관급자재 구매 현황

구 분	자 재 명	규 격	단 위	수 량	비 고
차도 포장	판석(고흥석)	T200,잔다듬	㎡	1,300
	V자형 가공	모굴림	m	13,000

Ⅳ		제안 및 선정기준

관련근거 :『조달사업에 관한 법률 시행령』제7조의2제5항

제안기준 : 중소기업자가 경쟁제품인 경우 1억원 이상

선정기준 : 표준평가방식(Ⅱ)(가격우선)

≪표준평가 방식≫

구 분	평가항목	평가지표	배점
표준평가 (Ⅱ)	가격	제안가격의 적정성	75점
	적기납품	납기지체여부	15점
	사후관리	계약이행실적평가	5점
	품질관리	조달청 및 전문기관검사, 품질점검 결과	5점
	신인도	불공정행위 이력 평가 결과	-0.25점
		최저임금 위반	-0.5점
		임금체불	-0.5점
		고용개선조치 미이행	-0.5점
		고용우수기업	+1점
		일자리 으뜸기업	+0.5점
		기술 인증	+1점

- 제안평균가격: (각 제안자의 제안가격 합계)/(제안자의 수)

- 가격제안이 제안 평균가격의 100분의 95이하인 경우의 가격평점은 만점으로 평가한다.

- 가격평점이 배점의 100분의 60 미만일 경우에는 가격평점을 배점의 100분의 60으로 평가한다.

Ⅴ		향 후 계 획

’19. 9월 : 관급자재 발주

’19. 9월 : 낙찰자 결정 및 자재 납품.

따로붙임  1. 제안요청내역서 1부.

2. 자재구매 시방서 1부.  끝.