문서번호	건축부-15816
결재일자	2019.9.11.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		의료시설과장	건축부장
김민수		신추교	09/11 임인구
협조

「남산예장자락 재생사업(공원 및 주차장)」

EXPANTION JOINT 삭제 실정보고

2019. 9.

「남산예장자락 재생사업(공원 및 주차장)」

EXPANTION JOINT 삭제 실정보고

「남산예장자락 재생사업」관련 건설사업관리단으로부터 EXPANTION JOINT 삭제에 대한 실정보고가 제출되어 검토보고 드림

Ⅰ		공사개요

○ 위    치 : 중구 예장동 4-1번지 일대

○ 공사개요 : 지하1층/지상1층, 연면적 16,992㎡, 신축

○ 공사기간 : ‘17. 8. 31. ~ ‘19. 12. 31.

○ 공 사 비 :**********

○ 시 공 자 : KBI 산업개발(주)

○ 감 리 자 : ㈜동성엔지니어링건축사사무소

Ⅱ		실정보고 내용

○ 근 거 : 남산예장 감리 제2019-407(’19.09.09.)호

○ 변경 사유

- 곤도라 설치시 건물 구조물 철거를 대비하여 메인홀 지붕층에 E,J 를  설치하는 것으로 설계에 반영되어 있으나, 공사준공 후 시설물 유지관리시 누수로 인한 하자 발생이 우려되어 구조물을 일체화하여 시공하고자 함.

○ 세부 변경 내역

구 분	당 초		변 경	비 고
기타공사 (메인홀 지붕층 EXPANTION JOINT)	*************** **********	***	****	******* **********
	*****	***

○ 변경 도면

Ⅲ		건설사업관리단 검토의견

**************************************************************************

*********************************************

Ⅳ		처리의견

○ 건설사업관리단으로부터 제출된 검토보고 내용이 적정하므로 실정보고 승인 통보 및 향후 설계변경에 반영코자함.

붙임 : 실정보고서 1부.  끝