＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	서울물연구원
수신자	내부결재
(경유)
제 목	변경계약체결 보고-서울물연구원 연구실 증축 공사(장기계속)-2차

『서울물연구원 연구실 증축 공사(장기계속)-2차』건에 대하여 변경계약체결하고   결과를 보고합니다.

1. 변경계약내역

대표계약자	대표자	주소	금차계약금액
***********	***	*************************************************	************

가. 변경계약일자 : 2019. 9. 9.

나. 변경전 금차준공일자 : 2019. 9. 16.

다. 변경후 금차준공일자 : 2019. 10. 29.

라. 준공기한 변경사유 : 설계변경에 따른 절대공기 부족 등

붙임  1. 공사변경계약서 1부

2. 합의각서 1부.  끝.

주무관	이준영		총무과장	이미영		서울물연구원장	09/10 정광현
협조자	주무관	김민식		주무관	강진호
시행	총무과-11124	(		)	접수		(		)
우			/
전화		/전송		/		/	부분공개(6)