문서번호	토목부-16532
결재일자	2019.9.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	광역도로과장	토목부장
이한규	박일연	09/11 김용제

교통소통대책 변경 설계비 및 홍보 안내간판 추가 설치 검토보고

(율곡로 창경궁앞 도로구조개선공사)

2019. 9.

도시기반시설본부

(토 목 부)

교통소통대책 변경 설계비 및 홍보안내간판 추가 설치 검토보고

(율곡로 창경궁앞 도로구조개선공사)

PC아치 설치 작업 교통소통 대책 변경(야간→주간작업) 및 교통 통제 안내 홍보간판 추가 설치에 대하여 검토보고 드림.

관련근거

○ 2019년 제8차 도로점용공사장 교통소통대책 자문회의 결과 알림(교통운영과- 9571호, ‘19. 6. 3.)

○ 공사중 교통안전시설물 개선(변경) 설치 통보(하달)(서울지방경찰청 교통관리과-14915호, ‘19. 6.14)

사업개요

○ 공 사 명 : 율곡로 창경궁앞 도로구조개선공사

○ 위    치 : 종로구 권농동 8(창덕궁 교차로) ~ 원남동 166(원남동사거리)

○ 규    모 : 도로확장 폭 4차로 → 6차로, 연장 810m,(지하차도 320m)

○ 사업기간 : ‘08. 1 ~ ‘19.12.

○ 총사업비 : 85,370백만원

○ 시공사 / 감리사 :  북일종합건설(주) / (주)한국해외기술공사

현 황

○ 상부 구조물(PC- 아치) 설치는 야간작업으로 계획되어 교통소통 대책(3-10단계, 11단계)을 야간작업으로 계획하였으나,

○ 중량물설치에 따른 대형장비 조합으로 인하여 안전사고 우려 및 야간작업 효율성이 떨어져 주간작업 및 일부 차로통제 변경을 위해 서울지방경찰청 및 교통운영과 교통심의에 필요한 공사중 교통소통 대책 설계서 작성이 필요함.

○ 서울지방경찰청의 공사중 교통소통대책 변경심의(규제) 이행조건으로 홍보안내간판(전광판) 및 각종 홍보물 추가 설치 요구 조건 이행이 필요함.

○ 교통소통대책 변경 단면비교

당초(야간)	변경(주간)

검  토

○ 공사중 교통통제 심의위원회 심의자료(교통처리계획) 및 서울지방경찰청의 규제 심의 이행조건 사항인 홍보 안내간판 추가 요청사항 반영이 필요함.

◆ 설계변경 근거

○ 지방자치단체 공사계약 일반조건 제6절 1. 가.

- 설계서의 내용이 불분명하거나 누락·오류 또는 상호 모순되는 점이 있을경우

- 그밖에 발주기관이 설계서를 변경할 필요가 있다고 인정할 경우

□ 견적단가 비교검토

(공급가액 제외)

구 분	회사명	금 액	적 용	비 고
현수막, 배너 설치 및 철거	㈜주아택	3,359,000	◎
	디자인시선	6,020,000
	해성광고기획	6,360,000
교통소통 대책설계비	㈜트랙픽스	20,500,000	◎
	㈜지평도시교통엔지어링	23,000,000
	㈜명성	25,000,000

○ 신규단가 적용 요율

구분	신규단가 적용율 근거	비고
신규단가 적용 근거	○ 관련법규 ▶ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제74조(설계 변경으로 인한 계약금액의 조정) ④항 3. 지방자치단체에서 설계 변경을 요구한 경우(계약상대자에게 책임이 없는 사유로 인한 경우를 포함한다) ▶ 공사계약 일반조건(지방자치단체 입찰 및 계약집행 기준) 제7절 계약금액의 조정 1. 설계변경으로 인한 계약금액의 조정 ▶ 신규단가 적용율 : (100% + 69.472%) / 2 = 84.736%(단가협의서 첨부)

개략 공사비 증·감

(단위 : 원)

공 종	설계가 (100%)	협의율 (84.736%)	비고
현수막, 배너 설치 및 철거	10,785,560	10,272,832
간 접 공 사 비	1,987,168	1,901,743
교통소통 대책설계비	20,500,000	17,370,880
공 급 가 액	33,272,728	29,545,455
부 가 가 치 세	3,327,272	2,954,545
도 급 액	36,600,000	32,500,000

감리 검토의견

○ 상부구조물(PC Arch)설치는 야간작업으로 계획되어 교통소통계획(3-10, 11단계)이 수립되었으나, 중량물 설치 대형장비조합 공종으로 안전사고가 우려되며 작업효율성이 떨어져 주간으로 변경에 따른 교통소통처리대책 설계비, 홍보안내간판, 배너 설치비를 검토한 결과 타당한 것으로 판단됨.

조치의견

○ 교통소통처리대책 설계비, 홍보안내간판, 배너 설치 비용 반영을 위하여 감리단에서 검토한 사항에 대하여 승인 하고자 함.

○ 증액되는 공사비 32,500천원에 대하여는 추후 설계변경에 반영하고자 함.

붙임 : 1) 감리 검토의견서 1부.

2) 관련공문 1부.   끝.