문서번호	시설과-6718
결재일자	2019.9.17.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
★주무관	주무관	시설과장
김병수	이춘한	전결 09/17 양희상
협 조

체력단련실 환경개선 전기공사

준공기한 연기 검토 보고

2019년 9월

서 울 대 공 원

시 설 과

체력단련실 환경개선 전기공사

준공기한 연기 검토 보고

2019년 서울대공원 체력단련실 환경개선 전기공사 기간을 아래와 같이 연기하여 공사추진에 만전을 기하고자 함.

1		관련 근거

● 2019년 서울대공원 체력단련실 환경개선 전기공사 시행

[시설과-1437(2019.3.6.)]

- 공사개요 : 舊 종관소 전기설비 전면 교체를 통한 체력단련실 조성

- 공사기간 : *************************

2		사업 개요

● 공사개요

구분	계 약 명	공사기간	계약금액	계약업체	공 사 내 용
전기 공사	2019년 서울대공원 체력단련실 환경개선 전기공사	********** ** **********	********	**** ****	- 전등 · 전열(콘센트) 설비 교체 - 각종 신설부하 전원 공급을 위한 배관 · 배선 등

● 진행현황

연번	위치	공정	비고
1	샤워 · 탈의실	전등 · 전열 설비(전선관 등 포함) 철거	완료
		분전반 임시 철거 및 차단기 교체	미완료
		전등 · 전열 설비(전선관 등 포함) 신설	미완료
		화재감지기 신설	미완료
2	체력단련장	전등 · 전열 설비(전선관 등 포함) 철거	완료
		전등 · 전열 설비(전선관 등 포함) 신설	미완료
		화재감지기 철거 후 신설	미완료

3		준공기한 연기 검토 사유

● 연기 사유 : 공사기간 부족

- 건축 · 기계 공사 선행 후 전기공사를 해야하므로 준공일 연장 · 조정 필요

● 추가공사 소요 기간 : *****************

구 분	계 약 명	계약업체	공사 기간		비고
			변 경 전	변 경 후
전기 공사	2019년 서울대공원 체력단련실 환경개선 전기공사	**** ****	********** * **********	********** ** ***********	*** **

※ 지체상금 부과여부 : 미부과

※ 공사금액 : 변경없음

4		처리 의견

● 공사진행 상황 등 종합적으로 검토한 바, 준공기한을 ****

************** 연장하여 공사 추진에 만전을 기하고자 함

5		향후 계획

● 2019. 9. : 공사기간 연장 계약 의뢰 후 공사추진.  끝.