문서번호	급수운영과-21145
결재일자	2019.9.17.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장
강병국		09/17 김정수
협 조

부단수차단공법(라인스토핑) 시행 적정성 검토보고

(신월6동 558번지외 6개소 배급수관 정비공사)

2019. 9.

부단수차단공법(라인스토핑) 시행 적정성 검토보고

(신월6동 558번지외 6개소 배급수관 정비공사)

신월6동 558번지외 6개소 배급수관 정비공사 감리사(서울시설공단)로부터 실정보고(200mm라인스토핑)가 접수되어 적정성을 검토하고 아래와 같이 보고함

□ 관련근거

○ 부단수차단공법(5구간)검토보고[공사감독2처-13147(2019.9.16.)]

□ 공사현황

○ 공 사 명 :  신월6동 558번지외 6개소 배급수관 정비공사

○ 공사개요 : D=80~300mm L=1,085m

○ 도 급 비 : ***********원

○ 도 급 자 : ****************

□ 검토내용

○ 수계전환 및 관망조사 결과 대규모 단수 수반

○ 공사구간 주변에 신축관등 취약시설 존재여부

○ 관 받침대 등 안전 사고 방지를 위한 조치여부

○ 라인스토핑에 필요한 안전공간 확보 및 비상연락망 구축여부

□ 검토의견

○ 대규모 단수가 없도록 부단수차단공법 [D200mm 라인스토핑] 시행

○ 공사구간 주변에 신축관등 취약시설 부존재 확인.

○ 관 받침대 등 안전 사고 방지를 위한 조치완료.

○ 안전공간 확보 및 비상연락망 구축 완료되어 안전시공 가능.

□ 행정사항

○ 부단수차단공법(라인스토핑) 시공승인 통보

- 공사안내표지판, 교통시설표지판 등 설치 지침 준수 및 안전공사 시행      등 철저

붙  임: 1. 관련공문 각1부. 끝.