“소비자는 소득공제 40％, 판매자는 수수료 0％” 정답은 제로페이!
	서울특별시
수신자	재무과장
(경유)
제 목	계약기간 변경 계약 의뢰[한양도성 인왕산 군초소 철거 및 여장복원공사,감리용역]

1. 한양도성도감-제9514호(‘19.9.17.)와 관련입니다.

2. 우리 부서에서 시행중인 「한양도성 인왕산 구간 군초소 철거 및 성벽복원」 공사 및 문화재 감리용역에 대하여 아래와 같이 변경 계약(계약기간 변경)을 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

계 약 명	계 약 자	계약기간		비 고
		변경 전	변경 후
한양도성 인왕산 구간 군초소 철거 및 성벽복원공사	원택건설(주) 대표 ***	‘18.11.16 ∼ ’19.9.18	‘18.11.16 ∼’19.10.2	계약기간 14일 연장
한양도성 인왕산 구간 군초소 철거 및 성벽복원공사 문화재 감리용역	㈜경복영건 대표 ***	‘18.11.13 ∼ ’19.9.18	‘18.11.13 ∼ ’19.10.2

붙임  1. 공사 및 감리용역 계약기간 변경 시행 보고서 1부.

2. 합의 각서 2부.  끝.

	한양도성도감과장
★주무관	박근우		도성보존팀장	곽동진		한양도성도감과장	09/17 안중호
협조자
시행	한양도성도감-9518	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 (서소문동) 서울시청 서소문 청사 1동 5층	/	http://www.seoul.go.kr
전화		/전송		/		/	부분공개(5)