투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	강서도로사업소
수신	서울시설공단이사장
(경유)	공사감독1처
제목	『등촌지하차도 보수공사』준공기한 연기 통보

1. 서울시설공단 공사감독1처-5657(2019. 9. 10)호와 관련입니다.

2. 귀 공단에서 감독업무 시행중인 『등촌지하차도 보수공사』와 관련 아래와 같이 준공기한이 연기되었기 알려드리니 사업추진에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

▣ 준공기한 연기 :

당  초 : 2019. 3. 4 ~ 2019. 9. 17

변  경 : 2019. 3. 4 ~ 2019. 11. 15.

별첨 : 변경계약서 1부.  끝.

	서울특별시 강서도로사업소장
주무관	강연홍		시설보수과장	전결 09/18 박병연
협조자
시행	시설보수과-8163	(		)	접수		(		)
우	07520		/	www.seoul.go.kr
전화	2657-7971	/전송	2657-7970	/		/	부분공개(5)