문서번호	급수운영과-18948
결재일자	2019.9.18.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관		급수운영과장
윤승구		09/18 유승효
협 조
	주무관		최용진

보 고 서

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

북부수도사업소

(급수운영과)

보   고   서

명에 의거 도봉,노원구 관내 상수도시설물 담당 업무 수행 중 아래와 같은 사항에 대하여 보고합니다.

2019. 9. 18

보고자 : 지방시설주사보 윤 승 구

□ 관련근거

○ 본부 시설관리과-262(2019.01.08.)『2019년 시설물 유지관리사업 추진계획』

○ 북부 시설관리과-4147(2019.03.06.)『2019년 노후밸브 정비 및 예산사용 계획 보고』

○ 본부 시설관리과-3672(2019.04.10.)『노후밸브 정비 철저』

○ 본부 시설관리과-7490(2019.07.24.)『소화전 노후밸브 정비 및 예산집행 철저』

□ 보고내용

○ 우리사업소 관내 상수도시설물 유지관리 사업의 원활한 추진을 위하여 노후밸브 및 소화전 노후밸브에 대한 정비계획 수립 후 추진중에 있으나,

○ 노후밸브 위치 산재 및 여름철 단수 수반으로 인한 노후밸브 교체 불가 등으로 정비 실적이 다소 저조한 실정임.

○ 정비목표 및 실적(8월말 기준)

- 노후밸브(목표:105개소, 실적:40개소), 소화전용 노후밸브(목표:80개소, 실적:68개소)

□ 조치의견

○ 상기와 같은 실정으로 현재 계약 후 공사 진행중인 『2019년 도봉,노원구관내 상수도시설물 보수공사 해주건설(주)』 외에, 진행중인 연간단가계약업체 『2019년 도봉구관내 급수공사 성윤개발(주)』에 병행으로 작업지시하여

○ 노후밸브 및 소화전용 노후밸브 목표달성에 만전을 기하고자 합니다.

- 공사개요 : 노후밸브 및 소화전용 노후밸브 교체

- 지시기간 : 2019년 정비목표 완료시까지