문서번호	교량안전과-16006
결재일자	2019.9.19.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		교량관리팀장	교량안전과장
신익현		강천수	09/19 김종호
협조

- 한강교량 일상유지보수공사(2공구) - 설계변경 검토보고(총괄1회)

2019. 9.

안 전 총 괄 실

(교량안전과)

- 한강교량 일상유지보수공사(2공구) -

설계변경 검토보고(총괄1회)

한강교량 일상유지보수공사(2공구)에 대한 책임건설사업관리기술자로 부터 제출된 설계변경(제1회) 도서에 대한 검토 보고임.

※ 설계변경(제1회)도서 제출<동성감리 제2019-668호, 2019.09.03>

1		공 사 현 황

<공사 개요>

￭ 공 사 명 : 2019년 한강교량 일상유지 보수공사(2공구) - 연간단가

￭ 공사기간 : 2019. 2. 25 ~ 2019. 12. 31

￭ 총사업비 : 3,195백만원 (도급비 2,895백만원, 관급자재 200백만원, 이전비 100백만원)

￭ 시 공 사 : ㈜재강건설

￭ 건설사업책임감리 : ㈜동성엔지니어링 외 2개사

￭ 사업내용

공 종	수 량	공 종	수 량
아스팔트포장 및 방수	15a	상판보수	200㎡
신축이음보수	68m	균열보수	200m
표면보수	1,850㎡	단면보수	400㎡
강재도장	1,020㎡	차선도색	백색(1,000㎡),황색(120㎡)

2		변경 검토내용

○ 대  상 : 제1차 ~ 제20차 작업지시

○ 변경사유

-「2019년 한강교량 일상유지 보수공사(연간단가)-2공구」계약이후 작업지시에 따른 계약물량 조정 및 신규공종에 대한 내역반영

○ 검토할 내용

․ 작업지시에 따른 완료 수량 증․감 반영 내역

․ 산업안전보건관리비 적용 대상

․ 신규공종 및 조정수량 반영 내역

※ 주요 작업지시 현황

지시번호	대상시설물	주요 작업내용	비고
1차	동작대교외 4개소	조인트유간청소, 교량배수구청소	작업완료
2차	마포대교외 3개소	조인트유간청소, 교량배수구청소 교량 잡초제거	작업완료
3차	서강대교외 5개소	강관배관, 출입문설치, 단면보수, 긴급출동	작업완료
4차	동작대교	신축이음장치교체	작업완료
5차	마포대교	안전 쿠션가드, 잡철물제작 및설치(난간보호대), 폐전선관 철거	작업완료
6차	동작대교	후타재보수, 버스정차대보수,난간파이프 교체, 점멸등 제거 및 설치	작업완료
7차	양화대교	신축이음장치보수(WD80)	작업완료
8차	양화대교	신축이음장치보수(WD80,WD110)	작업완료
9차	한강대교	균열보수 25.1m, 단면보수 1.53㎡, 강관배관 28m, 누수차단장치 42m	작업완료
10차	한강대교	방호벽차수조인트 6m,강관배관 철거 및 재설치 24m	작업완료
11차	행주대교	신축이음장치보수 13.5m,신축이음장치 덮개 62.1kg, 난간 설치 6m	작업완료
12차	행주대교	난간상부통행식점검구 개선 10개소	작업완료
13차	행주대교	난간상부통행식점검구 개선 13개소	작업완료
14차	마포대교	난간상부통행식점검구 개선 5개소	작업완료
15차	마포대교	데크설치 15.35㎡, 신축이음부난간 가로 받침대 가림판 15개소	작업완료
16차	행주대교	긴급출동 2회	작업완료
17차	서강대교외 5개소	충격흡수시설 3개소, 교량배수구청소 120ea, 안전쿠션가드 1.2㎡	작업중
18차	원효대교	AL배관 27.7m, 교량배수구청소 165ea,일일노무 4hr	작업중
19차	한강대교	신축이음 41.4m, 조합페인트칠 555㎡, 소규모도로긴급복구 40.5㎡	작업중
20차	동작대교	신축이음장치보수 55.95m, AL배관 172m	작업중

3		검 토 결 과

○ 계약 공종별 변경(증감) 내역

공 종	세 부 내 용	단위	당 초	변 경	증 ․ -감	비고
철거공	절단(아스팔트, 콘크리트)	m	***	***	****
교면보수공	절삭 후 아스팔트 덧씌우기	a	**	**	*
방수공	도막식	㎡	*****	*****	*
신축이음보수공	핑거조인트 등 신축이음장치 보수	m	*****	******	******
상판보수공	상판보수	㎡	***	***	***
콘크리트보수공	균열보수	m	***	***	*
강재보수공	강관배관 STS D150	m	***	***	****
도장보수공	강재보수도장(내, 외부)	㎡	*****	****	****
난간 및 차량방호책 보수공	난간파이프 교체	m	**	**	*
가시설공	비계발판 설치	㎡	***	***	****
교통 및 안전시설	차선도색	㎡	*****	*****	****
청소	구조물세척	㎡	*******	*******	*******

○ 산업안전보건관리비 적용 대상

- 적    용 : 총공사금액 4천만원 이상인 공사(개별단위 작업지시 금액)

→ 제11차(행주대교), 제19차(한강대교), 제20차 (동작대교)

- 적용방법 : 관련규정에 따라 내역 반영후 준공시 정산

→ 5억이상 50억미만 일반건설(갑)

구 분	금 액(천원)		증․감(△)	비 고
	당 초	변 경
산업안전보건관리비	-	******	******

※ 적용기준 : (재료비(관급포함)+직접노무비의 합계액) × 1.86% + 5,349천원 또는

(재료비+직접노무비) × 1.86% × 1.2 중 적은금액

․ 산업안전보건법 제30조(산업안전보건관리비의 계상), 건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준

○ 물량조정 내역반영

- 신규 단가 및 물량증가 : 작업지시일 기준 산출단가의 협의율 적용

※ 관련근거 : 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준 제13장 공사계약 일반조건 제7절 1의 나항

- 적용방법 및 적용현황 (붙임3)

구 분	적용차수	적용률(%)	비고
낙찰률 적용	3~15차, 17~18차	******
협의율 적용	16차, 19차~20차	******

○ 조정결과 공사비 증감

- 공사금액(변경없음)

구 분	공 사 금 액(원)			비 고
	당 초	변 경	증․감(△)
도급비	*************	*************	-
관급자재비	***********	***********	-
이전비	***********	***********	-
계	*************	*************	-

- 공사기간(변경없음) : 2019. 02. 26 ~ 2019. 12. 31

4		책임건설사업관리기술자 검토의견

○ ㈜재강건설에서 제출한「2019년 한강교량 일상유지 보수공사(연간단가) -2공구」작업지시에 대한 수량 조정 및 산업안전보건관리비, 단가적용, 신규 공종 반영 사항 등에 대하여 설계변경(1회) 서류를 검토한 결과 적정함

5		조 치 계 획

○ 상기 검토결과와 같이 건설사업관리리단에서 제출한 검토 의견이 적정한 것으로 판단되므로 변경․시행코자 함

붙임  1. 책임건설사업관리기술자 설계변경 보고서 1부

2. 변경 설계도서 각 1부

3. 주요수량 변경내역 1부

4. 합의각서 1부

5. 설계변경 도면 1부(별첨). 끝.