문서번호	한양도성도감-9650
결재일자	2019.9.19.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		도성보존팀장	한양도성도감과장
구선이		곽동진	09/19 代김종필
협조

<한양도성 혜화문 보수 공사>

설계변경 추진계획

2019. 9.

한양도성 혜화문 보수 공사 설계변경 추진계획

한양도성 혜화문 보수 공사에 다음과 같이 변경사항이 있어 제출된 실정보고 사항에 대한 설계변경을 추진코자 함

공사개요

○ 공 사 명 : 한양도성 혜화문 보수공사

○ 공사기간 : `19. 07. 04. ~ `19. 10. 05.

○ 계약금액 : 금100,861,870원

○ 시 공 자 : 한옥협동조합********

추진경위

○ 2019. 3. 5. ~ 4. 13. : 혜화문 보수공사 설계용역 실시

○ 2019. 7. 8. : 혜화문 보수공사 착공

○ 2019. 8. 12. : 시공자 실정보고 제출

- 주요 내용 : 설계서 오류, 공종 추가 등 공사내용 변경 및 공사비 변경

○ 2019. 8. 28. : 실정보고 승인

○ 2019. 9. 18. : 시공자 설계변경 요청

검토내용

○ 공사 내용 변경

- 최초 설계서 검토 결과 설계서 오류

공종	변경전	변경후	검토 결과
협문 수지처리	일위대가 표준품셈 1㎥로 적용	일위대가 표준품셈 0.1㎥로 적용	적용 단위 오류 정정
협문 수지처리	수지처리 물량 0.08㎥	수지처리 물량 0.04㎥	물량 조정(감소)
수장 공사	마루해체 및 설치 물량 2.520㎥	마루 해체 및 설치 3.100㎥	물량 조정(증가)

- 착수 후 공종 추가 및 물량 변경

공종	변경전	변경후	검토 결과
장식기와 설치	-	취두2, 용두2, 잡상3	공종 추가
한식기와	여와1136, 부와454, 망와16, 부막새1	여와568, 부와227, 망와0, 부막새16	물량 조정
양성해체 및 바름	-	양성바름 공종 추가 39.230㎡	공종 추가
장식기와 보존처리	-	용두 2, 잡상 6 보존처리	공종 추가

- 설계 누락으로 공종 추가

공종	변경전	변경후	검토 결과
경관조명 철거 및 설치공사	-	투광등 및 케이블 철거 및 설치	공종 추가

- 공종 삭제

공종	변경전	변경후	검토 결과
문양모사	모로단청 1.2㎡	-	공종 삭제
지붕 트렌치 조사	트렌치 조사 1식	-	자문회의 결과 공종 삭제
협문 단청	협문 교체부재 단청 6.970㎡	-	공종 삭제

○ 공사기간 변경

- 당  초 : 2019.7.4. ~ 2019.10.5

- 변  경 : 2019.7.4. ~ 2019.11.24.(50일 연장)

※ 연장사유 : 실정보고 승인 내역 중 장식기와(취두 2개, 용두 2개, 잡상 3개) 제작 기간이 추가로 소요되어 과업 기간 연장

○ 계약금액 변경 : *******************************************

※ 실정보고 단가 적용기준

- 신규비목 : 실정보고 기준일(2019년 7월) 산정단가 ×낙찰율 적용(87.859%)

- 기존비목 물량증감 : 계약단가

예산상 조치

○ 계약금액 변경 : *******************************************

○ 예산과목

- 문화본부 한양도성도감, 한양도성 보존·관리·활용, 한양도성 보존‧정비, 한양도성 보수‧정비, 시설비(401-01) : 금22,221,500원

- 다음 사업의 낙찰차액 및 수의시담금을 활용 : 금20,791,630원

1)「혜화문 및 창의문 보수공사 설계용역」수의시담금 : 금436,000원

․ 문화본부 한양도성도감, 한양도성 보존관리활용, 한양도성 보존정비, 한양도성 보수정비, 시설비(401-01) / 품의번호 35번

2)「한양도성 혜화문 보수공사」낙찰차액 : 금14,428,130

․ 문화본부 한양도성도감, 한양도성 보존·관리·활용, 한양도성 보존‧정비, 한양도성 보수‧정비, 시설비 : 금6,257,320원 / 품의번호 88번

․ 문화본부 한양도성도감, 한양도성 보존·관리·활용, 한양도성 보존‧정비, 남산 회현자락 한양도성 보존·정비, 시설비 : 금8,170,810원 / 품의번호 89번

3)「한양도성 혜화문 현판복원  설계용역」수의시담금 : 금178,000원

․ 문화본부 한양도성도감, 한양도성 보존관리활용, 한양도성 보존정비, 한양도성 보수정비, 시설비(401-01) / 품의번호 43번

4)「한양도성 혜화문 현판복원 공사」낙찰차액 : 금5,749,500원

․ 문화본부 한양도성도감, 한양도성 보존·관리·활용, 한양도성 보존‧정비, 한양도성 보수‧정비, 시설비 : 금4,297,260원 / 품의번호 90번

․ 문화본부 한양도성도감, 한양도성 보존·관리·활용, 한양도성 보존‧정비, 남산 회현자락 한양도성 보존·정비, 시설비 : 금1,452,240원 / 품의번호 91번

향후 계획

○ 상기의 변경 사항으로 계약변경 후 공사 시행 및 완료

붙임  1. 시공자 설계변경 요청 공문 1부

2. 변경 내역 1부

3. 실정보고서 1부.  끝.