문서번호	총무과-10277
결재일자	2019.9.19.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관		총무과장
김종민		09/19 황차호
협 조
	주무관		이호완

- 제로에너지건물(ZEB) 구축을 위한 -

난지창착스튜디오 태양광 발전설비 예산 추가요청 계획

2019. 9.

서울시립미술관

(총무과)

- 제로에너지건물(ZEB) 구축을 위한 -

난지창착스튜디오 태양광 발전설비 예산 추가요청 계획

난지미술창작스튜디오 신재생에너지(태양광) 발전용량 증가에 따라 설치 예산을 추가 요청하고자 함

□ 추진근거

◯ 스마트 미술관 구축을 위한 ICT 기반 에너지효율화사업 3개년 추진계획

(서울시립미술관 총무과-3948, 2019.4.11.)

◯ 난지창작스튜디오 제로에너지건물(ZEB) 추진계획(시립미술관 총무과-7916, 2019.7.18.)

◯ 난지창작스튜디오 태양광 발전설비 설치 계획(시립미술관 총무과-8084, 2019.7.23.)

□ 사업계획 변경

◯ 태양광 발전용량 증가(변경)

구 분	당 초	변 경	비 고
에너지원	태양광	좌 동
발전용량	50kW	60kW (10kW 증가)	설계용역 결과 반영
설치장소	스튜디오 A, 전시장 상부	스튜디오 A, 전시장 상부, 스튜디오 B
예 산	133,000천원	159,600천원(26,600천원 증)

◯ 발전용량 증가(변경) 사유

- ***************************************

- *************************************

- ******************************************

□ 행정사항

◯ 태양광 발전용량 증가에 따라 예산 추가 요청(미술관 → 녹색에너지과)

- 추가요청 예산 : 26,600천원(133,000천원 → 159,600천원)

◯ 신속한 예산 집행으로 사업추진 만전.  끝.