더 가까운 이웃 더 편안한 동네, 행복성북
		성북구
수신자		내부결재
(경유)
제목	길음동 문화복합미디어센터 건설사업관리용역(감독권한대행) 2차 시행

우리구에서 시행중인「길음동 문화복합미디어센터 신축공사 건설사업관리용역」에 대하여 1차 용역기간이 만료됨에 따라 아래와 같이 2차 용역을 시행하고자 합니다.

1. 용 역 명 : 길음동 문화복합미디어센터 건설사업관리용역 2차

2. 용역개요

- 대지위치 : 성북구 길음동 1286-8(대지면적 : 4,144㎡)

- 규    모 : 지하2층/지상4층, 연면적 9,485㎡)

- 용역내용 : 건축,토목,기계,전기,통신,소방공사 등에 대한 건설사업관리용역(감독권한 대행)

- 계 약 자 : ㈜포스코에이앤씨건축사사무소 대표 김대원,

㈜비전이엔지기술사사무소 대표 손호섭

- 2차 용역금액 및 기간                                               (단위 : 원)

구분		계	포스코 A&C	비전 이엔지	용역기간	비고
총차	계약금액	1,573,440,000	1,206,041,760	367,398,240	2018.03.26. ~2020.03.31.	737일
	비율	100%	76.65%	23.35%
1차	계약금액	1,079,122,000	861,031,444	218,090,556	2018.03.26. ~2019.09.06.	530일
	비율	100%	79.79%	20.21%
2차	계약금액	494,318,000	345,010,316	149,307,684	2019.09.07. ~2020.03.31.	207일
	비율	100%	69.80%	30.20

3. 추진근거

- 길음동 문화복합미디어센터 건설사업관리용역 1차 기간 만료에 따른 2차 용역 시행

- 건설사업관리용역 변경계약 검토보고(성북구청 건축과-21905, 2019.09.05.)

- 건설기술진흥법 제39조 및 동법 시행령 제55조

4. 예산과목

- 문화본부 문화시설과 / 문화도시 기반 조성 / 문화예술시설 건립 / 길음동 문화복합시설 건립 / 시설비 및 부대비 / 시설비 (시비55,208,900원)

- 문화체육과 / 문화예술진흥 및 문화유산보존전승 / 문화기반시설 확충 / 길음동문화복합미디어센터 건립 / 시설비 및 부대비  / 시설비 (구비439,109,100원)

붙임 : 1. 용역설명서 1부.

2. 건설사업관리용역비(2차) 산출서 1부.

3. 과업내용서 1부.

4. 부당계약특수조건 발주부서 체크리스트 1부.

5. 청렴계약이행서약서 1부.

6. 건설사업관리용역 변경계약 검토보고 1부.  끝.

주무관							나재강				공공건축담당					박정우					건축과장					김재열					도시환경국장						09/19 이계섭
협조자				주무관							정연규					주무관							안호성					주무관								강창진
문화기획담당							홍지현				계약담당					강은주					문화체육과장					임근수					재무과장						代차선숙
시행			건축과-22886										(						)		접수												(						)
우	02848					서울특별시 성북구 보문로 168 (삼선동5가) 성북구청 건축과																/			http://www.seongbuk.go.kr
전화		2932							/전송			02)2241-6547					/														/	부분공개(5)