문서번호	도시관리과-10439
결재일자	2019.9.19.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
전문관	도시관리정책팀장	도시관리과장
장지광	김동구	09/19 홍선기

『상업지역 공동주택 용적률체계 마련 용역』

준공기간 연장 보고

2019. 9.

도시관리과

『상업지역 공동주택 용적률체계 마련 용역』

준공기간 연장 보고

현재 상업지역 공동주택 용적률 체계 마련을 위해 용역 중에 있으나, 시 정책에 미치는 영향 등을 고려, 신중한 검토를 위해 사례조사 및 관련사업과의 정합성 등 추가 검토 필요로 준공기한을 연장코자 함

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 상업지역 공동주택 용적률체계 마련 용역

○ 과업기간 : `19. 6. 19. ~ `19. 9. 19.

○ 계약금액 : 14,500,000원

○ 용역업체 : ㈜동해종합기술공사

○ 과업내용 : 상업지역 내 공동주택건립 관련 용적률체계 마련

**********************

□ 추진현황

○ `19. 6. 19. : 용역계약 체결

○ `19. 7. 10. : 착수보고

○ `19. 7. 16. : 국장보고(1차)

○ `19. 8. 23. : 국장보고(2차)

○ `19. 9. 10. : 행정2부시장 보고(중간보고 1차)

□ 준공기한 연장

○ 준공기한 연장 : 2개월

- 당초 : `19. 6. 19. ~ `19. 9. 19. / 변경 : `19. 6. 19. ~ `19. 11. 19.

○ 연장사유 : 시 정책에 미치는 영향을 고려, 신중한 검토를 위한 추가 과업 수행에 따른 준공기한 연장

- 상업지역 내 공동주택 건립을 위한 지구단위계획 사례 조사 추가

- 재촉지구, 도시정비형 재개발 정비구역 등 다양한 사업과의 정합성 검토 추가

○ 귀책사유 : 서울시(지체상금 미부과)

○ 계약금액 : 변경없음

□ 추진일정

○ `19. 09. 변경계약 체결

○ `19. 10. 중간보고(2차)

○ `19. 11. 최종보고 및 용역준공.

붙임   1. 준공기한 연장 요청 공문(용역사) 1부.

2. 과업내용서(변경) 1부.  끝.