“소비자는 소득공제 40％, 판매자는 수수료 0％” 정답은 제로페이!
	서울특별시
수신자	재무과장
(경유)
제 목	준공기한 연기 의뢰(국회대로 소규모지하안전평가)

1. 시행중인 ‘국회대로 지하차도 및 상부공원화 소규모지하안전평가 용역’에 대하여 다음과 같이 준공기한 연기 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 국회대로 지하차도 및 상부공원화 소규모지하안전평가 용역

나. 계 약 자 : ㈜다산이앤지

다. 준공기한 연기내역

- 총차 : 당초) 2019.09.21 → 변경) 2019.12.31

라. 연기사유

- 비개착구간 지하안전평가 보완사항에 대한 용역의 절대공기가 부족하게 되어 준공기한을 연기.

마. 귀책사유 : 서울특별시

붙 임	1. 준공기한연기방침 1부.

2. 준공기한 연기의뢰서 1부.

3. 합의각서. 끝.

	도로계획과장
주무관	이일주		민자사업팀장	代이일주		도로계획과장	09/19 代정회원
협조자
시행	도로계획과-12988	(		)	접수		(		)
우	04524	서울특별시 중구 세종대로 110 10층 도로계획과 (태평로1가)	/
전화	02-2133-8072	/전송	02-2133-0763	/	21zu@seoul.go.kr	/	대시민공개