문서번호	도로보수과-9008
결재일자	2019.9.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		도로보수과장
주영진		09/19 류태용
협조

노후포장도로 정비공사(강서1구역)

책임감리 일일보고(9.17.)

2019.09.19.

강서도로사업소

(도로보수과)

분야별 건설사업관리기술자 업무일지

□ 성    명 : 김 돈 수

□ 일    자 : 2019. 09. 17 (화) (야간)

□ 근무시간 : 22 : 00 ~ (익일) 06 : 00

□ 용 역 명 : 도로굴착복구 및 노후포장도로 정비공사 건설사업관리용역(3권역)

○ 업 무 수 행 사 항

주요업무수행내용

◇ 2019년 노후 포장도로 정비공사 (강서1구역)   (22:00 ~ 익일 06:00)

No	노 선	위 치	공사계획(m)		금일작업량(m)		시공면적 (a)	작업내용	비 고
			B	L	B	L
1	남부순환로	외발산사거리 → 화곡로입구교차로	9.0	820	9.0	820	개질 WC-5 표층(t=5cm) 74.07a (864톤)	절삭후 아스팔트 덧씌우기 (T=5cm)

* 작업 2일차

* 외발산사거리 → 화곡로입구교차로 : 전 구간 포장 완료

지 시 사 항	조 치 사 항	비 고
○ 공사용 안내간판 및 노후포장공사 홍보 사전고시 ○ 교통안전시설설치 철저(보행자및차량유도) ○ 포장면 다짐 및 평탄성 관리 철저 ○ 기존포장 조인트부분 밀실 처리 ○ 작업시 최대한 민원(소음)이 최소화 하도 록 기능공에게 작업 전 주지 철저	○ 공사관련 홍보 사전고시 확인(현수막외) ○ 교통안전시설 설치 및 차량통행 확인 ○ 포장면 평탄성 관리 및 다짐상태 적정 ○ 기존포장 조인트부분 밀실 처리 확인 ○ 작업시 최대한 민원(소음)이 최소화 기능공 교육실시 ※ 참고사항 -	(야간)

분야별건설사업관리기술자 : 김  돈  수  (인)

건설사업관리 단계별 체크리스트

(절삭덧씌우기 포장공사)

○ 공 사 명 : 2019년 노후포장도로 정비공사 (강서1구역)

○ 점검위치 : 남부순환로(외발산사거리 → 화곡로입구교차로) - 2일차

○ 점검일자 : 2019. 09. 17 (22:00 ~ 익일 06:00)

(개질 WC-5)

구 분	점 검 항 목 및 내 용	점검결과
시 공 전	○ 공사시작 전 공사홍보 및 교통안내표지판, 공사안내현수막 설치	설치
	○ 1일 계획 작업량을 확인 하였는지 여부	74 a
시 공 중	○ 절삭면의 평탄성 상태 및 청소 상태의 적정성 여부	적정
	○ 설계와 동일하게 절삭 깊이를 유지하여 절삭 하였는지 여부	적정
	○ 적정 유제를 적정량 균일하게 살포하는지 여부 (프라임 코팅 1.0 ~ 2.0ℓ/㎡ , 택코팅 0.3 ~ 0.6ℓ/㎡)	적정
	○ 아스팔트 운반차량의 덮게 설치 여부	설치
	○ 아스팔트 혼합물위 적정 온도 여부 (145~160℃)	적정
	○ 아스팔트 혼합물의 확인시험을 위한 시료 채취 여부	채취
	○ 페이퍼뒤에 삽과 레이크 포장공 고정 배치 여부	적정
	○ 스크리트가 기존포장에 5cm 정도 겹치도록 포설되고 있는지 여부	적정
	○ 일정 두께로 포설 하였는지 여부	적정
시 공 후	○ 세로 시공이음은 노면표시와 일치 하는지 여부	일치
	○ 기존포장과 접속부 처리가 밀실 하는지 여부(접속부 유제 처리)	적정
	○ 임시차선 표시(오뚜기)를 적정하게 설치 하는지 여부	적정
	○ 포장 표면 상태 확인(평탄성,재료분리 및 블리이딩 여부)	확인
	○ 포장 마무리후에 주변정리 및 아스팔트 잔재 처리 여부	확인
	○ 포장표면 온도가 40℃ 이하에서 차량 개방 여부	준수
	○ 교통개방 시간 준수 여부 (오전 6시 이전)	준수
	○ 1일 시공량 확인 여부	74 a