문서번호	조경과-13602
결재일자	2019.9.19.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관	도시녹화팀장	조경과장	푸른도시국장
이승동	최석환	문길동	전결 09/19 최윤종

2020 서울국제정원박람회

마스터플랜용역 준공기한 연장 검토보고

2019. 9.

푸른도시국

(조 경 과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	■	□
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	■	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	■	□
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

2020 서울국제정원박람회

마스터플랜용역 준공기한 연장 검토보고

2020년 개최 추진중인 서울국제정원박람회 기본구상 및 마스터플랜용역에 대하여 과업내용 보완 등 사유로 아래와 같이 준공기한을 연장 시행코자 함

Ⅰ		용역개요

○ 용 역 명: 서울국제정원박람회 기본구상 및 마스터플랜용역

○ 용역기간: 2019. 3. 28. ~ 9. 23.【180일간】

○ 과업내용

- 수준높은 국제 규모의 정원박람회 개최를 위한 사전절차 검토

- 적절한 행사대상지 유형별 비교 및 적정 개최시기 검토

- 지역경제 활성화 및 정원산업 발전을 위한 장·단기 경제효과 분석

- 시설계획 및 공간배치 구상, 소요예산 산출 등

○ 용역수행: ㈜그룹한 어소시에이트 대표 박명권

○ 계약금액: 220백만원

Ⅱ		추진경위

○ 용역 시행계획 수립                           : 2019. 2. 12.

○ 용역계약                                     : 2019. 3. 28.

○ 박람회 개최 대상지 비교 검토보고             : 2019. 5. 27.

○ 해외 정원박람회 선진지 견학 결과보고         : 2019. 6. 10.

○ 2019년 서울시 4차 투자심사  의뢰           : 2019. 7. 23.

○ 용역 중간보고회 개최                         : 2019. 9.   6.

○ 중간보고 결과에 따른 보완사항 통보           : 2019. 9.  11.

○ 보완요청에 대한 회신(용역사→서울시)         : 2019. 9.  18.

Ⅲ		검토내용

○ 용역 준공기한 연기

구 분	용역기간	계약금액(단위:원)	비고
당 초	’19. 3. 28. ~ 9. 23.	220,000,000
변 경	’19. 3. 28. ~ 11. 25.	변경없음	63일 연장

○ 연기사유: 과업내용 추가 및 보완 등

- 관람객 접근성 전략 구상, 기존 서울정원박람회와의 차별성 부각 등

- 기존 활용시설 외 추가 실내시설 등 검토, 시설계획 및 예산 구체화

- 2019 서울정원박람회 결과보고 반영 등

○ 행정사항

- 귀책사유: 서울특별시

- 지체상금: 미부과

Ⅳ		향후계획

○ 용역 준공기한 연기 의뢰(조경과 → 재무과): 2019. 9. 19.

○ 보완사항 과업내용 반영 및 보고 등        : 2019. 10월 중

○ 용역 최종보고                            : 2019. 11월 중

○ 용역 준공                                : 2019. 11. 25.

붙임 1. 준공기한 연기의뢰서 1부.

2. 중간보고회 개최 결과보고 1부.  끝.