＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	서울물연구원
수신	총무과장
(경유)
제목	연구실 증축 공사(전기, 정보통신, 소방전기) 2차 준공기한 연기 의뢰

1. 연구실 증축 2차 공사와 관련, 우천 등으로 인한 절대공기 부족으로 건축공사 준공기한 이 연기되어 후행 공사인 2차 전기·정보통신·소방전기공사 준공기한 연기를 의뢰합니다.

가. 서울물연구원 연구실 증축공사(전기·소방·통신) 2차 계약내용

구분	계약자	총차 공사기간	2차 공사기간	총차공사비 (2차공사비)
전기공사	㈜은하전기 대표 정기덕	’18.10.24 ~’19.9.30	’19. 3.29. ~ 9.30.	205,471,960원 (155,471,960원)
정보통신공사	㈜일동전력 대표 오정미	’18.10.30 ~’19.9.30	’19. 3.29. ~ 9.30.	73,198,720원 (58,198,720원)
소방전기공사	㈜태주공영 대표 우종수	’18.10.31 ~’19.9.30	’19. 3.29. ~ 9.30.	55,337,700원 (40,337,700원)

나. 2차 준공기한 연기요청

구분	업체명	차수	공 사 기 간		비고 (계약금액)
			변경 전	변경 후
전기공사	㈜은하전기 대표 정기덕	총차	‘18.10.24~ ‘19.09.30	‘18.10.24~ ‘19.11.08	205,471,960원
		2차	‘19.03.29~ ‘19.09.30	‘19.03.29~ ‘19.11.08	155,471,960원
정보통신공사	㈜일동전력 대표 오정미	총차	‘18.10.30~ ‘19.09.30	‘18.10.30~ ‘19.11.08	73,198,720원
		2차	‘19.03.29~ ‘19.09.30	‘19.03.29~ ‘19.11.08	58,198,720원
소방전기공사	㈜태주공영 대표 우종수	총차	‘18.10.31~ ‘19.09.30	‘18.10.31~ ‘19.11.08	55,337,700원
		2차	‘19.03.29~ ‘19.09.30	‘19.03.29~ ‘19.11.08	40,337,700원

- 연기사유 귀책소재 : 서울물연구원

- 지체상금 부과 : 미부과

다. 예산과목 : 자본적지출, 유형자산취득, 건물, 서비스장비확충 및 환경개선,

시설비 및 부대비, 시설비

붙임 : 1. 준공기한 연기 사유서 각 1부.

2. 연구실 증축 2차공사(전기·소방·통신) 준공일자 연기 보고 1부.  끝.

	수도연구부장
★주무관	최병석		배급수과장	代최병석		수도연구부장	09/20 代한희선
협조자
시행	배급수연구과-7351	(		)	접수		(		)
우	04981	서울특별시 광진구 천호대로 716-10 (구의동)	/
전화	3146-1831	/전송	3146-1836	/	cbs63@seoul.go.kr	/	부분공개(6)