문서번호	기전과-9242
결재일자	2019.9.20.
공개여부	부분공개(5 7)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장
이성도		09/20 서승완
협조

『교통안전시설 원인자부담공사(성공회대입구 교차로)』

현장 실정보고에 대한 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 9.

강서도로사업소

(기전과)

『교통안전시설 원인자부담공사(성공회대입구 교차로)』

현장 실정보고에 대한 검토보고

우리사업소에서 승인한 교통안전시설(신호) 원인자부담공사와 관련    감리사로부터 현장 실정보고서가 제출되었기에 검토보고 드림.

Ⅰ		관 련 근 거

서울지방경찰청 교통관리과-13597(2019.06.03.)호

㈜태영알앤디 태영2019(신)-97(2019.09.19.)호

Ⅱ		공 사 개 요

공 사 명 : 2019년 서울시 횡단보도 확충정비사업(성공회대입구 교차로)

원 인 자 : 구로구청

공사기간 : 2019.08.14. ~ 2019. 10. 31.

공사장소 : 구로구 온수동 성공회대입구 교차로

공사개요 : 교통신호기(차/보) 신설 및 지주통합(신호등＋가로등)

관련업체 및 주요설치 내용

구 분	설 계	감 리	시공업체	승인주요내용
신호기	㈜동일기술공사	㈜태영알앤디	새한전설㈜	제어기 신설 1, 철거 1대 지주 신설4, 철거2, 이설1 신호케이블 등

Ⅲ		감리사 실정보고 내용

보고내용 : 시공 중 현장여건 변동으로 인한 물량 변경

주요변경내용 :

연 번	변경 전	변경 후	변경 사유
1	음향신호기 이설	음향신호기 교체 및 증설	음향신호기 고장 등
2	겸용지주(차/보)	차/보 지주 분리 시공(P8)	음향신호기 지장물(전주)
3	지주(P3)	지주(P3) 위치 변경	지장물(통신맨홀)
4		신호케이블 등 물량 변경	통합지주(가로등) 선로와 규격 상이

※ 변경 상세내역 : 붙임의 실정보고서 참조

Ⅳ		검 토 결 과

공사기간 연장 및 감리사 실정보고에 대하여 승인하고자 함

Ⅴ		행 정 사 항

원인자, 감리사 및 유관기관 승인 통보

붙임 1. 감리사 실정보고서 1부.

2. 실정보고내역서 및 설계도면 각 1부.  끝.