문서번호	기전과-7665
결재일자	2019.9.20.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

	시 민
주무관	기전과장
이지영	09/20 정판식

『2019년 교통안전표지 유지보수공사(연간단가)』

작업지시(4차) 계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 9.

동부도로사업소

(기전과)

『2019년 교통안전표지 유지보수공사(연간단가)』

작업지시(4차) 계획 보고

우리사업소에서 관리하는 교통안전표지 시설물의 유지관리 및 경찰청 개선사항 이행을 위하여 아래와 같이 작업지시(4차)하여 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함.

1		교통안전표지 현황

(단위 : 매)

계	주의표지	규제표지	지시표지	보조표지	기타
13,872	873	4,498	3,733	4,374	394

2		사업개요

공 사 명 : 2019년 교통안전표지 유지보수공사(연간단가)

공사위치 : 강남구, 송파구, 강동구, 서초구 일부 시도

공사개요 : 교통안전표지판 및 지주(부착대) 설치 및 유지관리

계약업체 : ㈜동아특수건설 대표 심석래

계약기간 : 2019. 3. 5.(화) ~ 12. 27.(금)

계약금액 : 금78,116,900원(금칠천팔백일십일만육천구백원정)

3		작업지시 계획

작업차수 : 작업지시 4차

작업기간 : 2019. 09. 23.(월) ~ 10. 22.(화)

작업지시 금액 : 금26,625,085원(금이천육백육십이만오천팔십오원정)

작업지시 내역

연번	관련근거	작업위치	작업내용
1	접수번호 (20190725900992)	강동구 성내동480번지	페이퍼폴 철거, 교차로대신설, 제한속도60 교체 [중형2]
2	송파경찰서 교통과 -9044 (2019.07.11.)	송파구 남4문사거리	유턴표지 판, 보조표지(보행신호시) 신설, 철주(2매용)신설 [중형2]
3	경정비 강풍대비점검	강남구 학동로81길 입구	주차금지.견인지역(부착대), 우회전금지.일방통행(부착대) [중형1]
4	경정비 강풍대비점검	강남구 학동로504	주차금지.견인지역(부착대) [중형1]
5	경정비 강풍대비점검	송파구 양재대로932	양보표지(부착대) [중형1]
6	경정비 강풍대비점검	강남구 언주로14-35	횡단보도,천천히(부착대) [중형1]
7	경정비 강풍대비점검	강남구 양재대로 구룡마을입구	주차금지.견인지역(부착대) [중형1]
8	경정비 강풍대비점검	강남구 양재대로(삼성의료원 -> 일원터널)	높이제한4.5, 보조표지(부착대) [중형1]
9	강남구청 교통행정과 -11084(2019.06.20.)	강남구 논현로836(이고성형외과)	우합류표지 교체 [중형1]
10	강남구청 교통행정과 -11084(2019.06.20.)	강남구 삼성로745	주차금지,견인지역 교체 [중형1]
11	강남구청 교통행정과 -11084(2019.06.20.)	강남구 역삼동711-3	주차금지,견인지역 교체 [중형1]
12	경정비순찰	강동구 양재대로1520	페이퍼폴 철거, 교차로대신설, 제한속도60 교체 [중형1], 주차금지,견인지역 교체 [중형1]
13	경정비순찰	강동구 양재대로1532	양보표지 철주 철거후 후방 가로등에 부착대로 변경 [중형1]
14	교통관리과-20720 (2018.08.21)	강남구 동호대교및R ~ 압구정 R(논현로)	죄회전금지,유턴금지,좌합류도로철거,좌회전및유턴 등[규격] 일시정지신설,철주신설[규격] 차높이제한 및 좌회전,보조표지 신설, 철주 신설 [규격] 좌회전금지및유턴,보조표지신설,철주 3매용 신설[규격] 좌회전및보조표지금지이설,철주2매용 신설 주정차금지신설,[중형1]
15	교통관리과-30255 (2018.12.05)	강남구 동호대교 밑 교차로	유턴및차높이제한판신설,철주(2매용)신설[중형1] 유턴이설및차높이제한판신설[중형1]
16	교통관리과-14523 (2019.06.12)	강남구 봉은사로 120 르메르디앙서울호텔	유턴 판 철거, 좌회전 및 유턴 신설 [중형2]
17	교통관리과-11451 (2019.05.09)	송파구 잠실대교 남단 및 강동구 천호대교 남단	횡단보도 판, 신호기판 신설 [규격]
18	교통관리과-11451 (2019.05.09)	강동구 구리암사대교 남단	횡단보도 판, 신호기판 신설 [규격]
19	접수번호 (20190820901547)	송파구 장지동 복정역	중앙차로, 좌회전, 직진 보조표지 교체 [중형1]
20	경정비순찰 (태풍관련)	송파구 삼전동 탄천1교	직진및우회전 판, 장애물표적표지 판, 철주 교체 [중형1]
21	접수번호 (201909098098793)	강동구 광진구 남단	주차금지, 견인지역 판 철주 교체 [중형1]
22	경정비순찰 (태풍관련)	강남구 도산대로 320	페이퍼폴 철거, 교차로대신설 및 정지 판, 보조표지 교체 [중형2]
23	교통운영과-2521 (2019.09.05)	강동구 고덕동 근린공원 등	감응신호 판 신설 [중형1]
24	교통관리과-17060 (2019.07.05)	송파구 송파대로 423 등	주차금지 판 [중형1] 및 보조표지 신설 등 4개소

25	송파경찰서 교통과 -12081(2019.09.11.)	송파구 방이동 방이삼거리	우회전금지 판. 보조표지 신설 [중형2]
26	접수번호 (20190831802444)	강남구 탄천2교 우성아파트	장애물표적표지 교체 [규격]
27	교통관리과-18431 (2019.07.19)	강남구 테헤란로 포스코사거리 등	진행방향별통행구분 판 신설, 유턴 판 및 보조표시 신설 [중형2]
28	송파구 주차관리과 -88057(2018.12.21.)	송파구 잠실6동 등	송파구 주차허용구간 표지판 문안수정 등 [규격]
29	교통관리과-6213 (2018.03.15)	강남구 밤고개로 21길 69	횡단보도판,부착대(1매용)신설[중형1]
30	교통관리과-29887 (2018.11.30)	강동구 동남로 중앙보훈병원 정문 앞	유턴, 횡단보도 판 신설 [중형1]
31	경정비순찰	서초구 헌릉로 260 어린이병원 앞	우측면통행 판, 철주 신설 [중형1]
32	경정비순찰	송파구 잠실동 잠실운동장역 앞	표지판 교체 [대형] 및 도색

작업완료보고서 제출기한 : 2019. 10. 22.(화)

4		행정사항

작업지시 내용을『2019년 교통안전표지 유지보수공사(연간단가)』       시공업체 및 감리업체에 발송하여 기한내 완료토록 지시

시공물량은 작업완료 보고서에 따라 설계변경 및 정산처리

붙 임 : 1. 작업지시 4차 내역서 1부.

2. 교통처리계획도 및 현장조사서 1부.  끝.