“소비자는 소득공제 40％, 판매자는 수수료 0％” 정답은 제로페이!
	서울특별시
수신	재무과장
(경유)
제목	계약변경 의뢰(한양도성 혜화문 보수공사)

1. 한양도성도감-9650(2019.9.19.)호와 관련입니다.

2. 우리부서에서 시행 중인 「한양도성 혜화문 보수공사」에 대한 변경계약을 의뢰하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 공사개요

- 계약건명 : 한양도성 혜화문 보수공사

- 계약업체 : 한옥협동조합*********************

- 계약금액 : ******************************

나. 변경내용 : 계약금액 및 계약기간 연장

구분	변경전	변경후	비고
계약금액	*************	**************	*************
계약기간	********************	*********************	******

※ 연장사유 : 한양도성 혜화문 보수공사 진행 중 양성바름 해체 및 설치, 장식기와 교체 및 보존처리 공종이 추가되고, 장식기와(취두 2개, 용두 2개, 잡상 3개) 제작에  3개월 정도의 기간이 소요되어 부득이 공사 계약기간을 ****연장하고자 합니다.

다. 예산과목

-*******************************************************************************************

********************************************

**********************************************

*******************************************************************************

*****************************************

*****************************************************************************************************

*******************************************************************************************************

**********************************************

*******************************************************************************

********************************************

*****************************************************************************************************

*******************************************************************************************************

붙임  1. 방침서 1부

2. 공사계약 변경 사유서 1부

3. 합의각서 1부

4. 설계 변경 내역서 1부.  끝.

	한양도성도감과장
★주무관	구선이		도성보존팀장	곽동진		한양도성도감과장	09/20 代김종필
협조자	계약총괄팀장	이정렬
시행	한양도성도감-9671	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 (서소문동) 서소문청사 5층	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2133-2672	/전송	2133-1063	/	ungum9@seoul.go.kr	/	부분공개(5)