문서번호	급수운영과-17760
결재일자	2019.9.23.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
★주무관	주무관	급수운영과장
유동훈	류태현	09/23 代서규석
협 조

실정보고서 검토 보고

(독산3동991-18~독산2동1038-1번지 외 1개소 노후 송배수관 정비공사)

2019. 9.

남부수도사업소

(급수운영과)

실정보고서 검토 보고

(독산3동991-18~독산2동1038-1번지 외 1개소 노후 송배수관 정비공사)

우리사업소에서 발주하여 시설공단에서 감독중인 『독산3동991-18~독산2동1038-1번지 외 1개소 노후 송배수관 정비공사』 현장 실정보고가 있어 검토 후 그 결과를 보고 드림.

□ 실정보고

○ “실정보고서 제출(양방향 교통통제에 따른 부대공 수량 증가)”

【서울시설공단 공사감독2처-12957(2019.09.10.)호】

□ 공사현황

○ 공 사 명 : 독산3동991-18~독산2동1038-1번지 외 1개소 노후 송배수관 정비공사

○ 공사기간 : 2019. 5. 14. ~ 2020. 1. 8.

○ 공사개요 : *********************

○ 도 급 비 : **************

○ 도 급 자 : **************

○ 감 독 자 : 시설공단 감독자 김기용

□ 공단보고내용

<현황 및 문제점>

○ 본 공사는 기존관 SP1,200~1,500mm를 철거하고 신설관 DP700~800mm를 부설하는 공사로써 확인굴착 결과 기존관이 왕복 4차로(독산동길)의 중앙차로에 위치하여 야간 굴착공사에 따른 도로점용 및 차량 통제 시 양방향 통제를 해야 하는 실정임.

○ 당초 설계는 1방향 교통통제를 기준으로 설계되어 있어 양방향 교통통제에 따른 교통정리원, 에어탑 설치, 안전시설 설치철거, 싸인보드카 등 부대공 수량의 증가가 불가피한 실정임.

<현장사진>

독산동길 → 남부순환로 방향 교통통제	남부순환로 → 동산동길 방향 교통통제

<검토의견>

○ 현장여건상 야간 굴착공사에 따른 양방향 교통통제가 필요하므로 안전하고 원활한 교통흐름을 위해 교통정리원, 에어탑 설치, 안전시설 설치철거, 싸인보드카 등의 추가 설치는 타당하다고 사료됨.

○ 개략공사비 산정

- 당초 1방향 교통통제에서 양방향 교통통제 적용(예정 작업일수 54일)

· 교통정리원 : 54인 → 108인 / 에어탑 설치철거 : 54일 → 108일

· 안전시설 설치철거 : 54일 → 108일 / 싸인보드카 : 324시간 → 648시간

- 개략공사비 : 증) 26,800천원(제경비 포함)

→ 차후 정산시 싸인보드카 계약수량 초과분에 대해서 신규단가(감액) 적용 예정

□ 검토의견

○ 확인굴착결과, 기존 노후 송수관이 공사구간 왕복 4차선 도로 중앙에 부설되어 야간공사 시행시 상기 도로 상·하행 각 1차선 점용이 필수적인 바,

○ 안전사고 예방 및 공사불편 최소화를 위해 기존 단방향 도로기준 교통통제 관련 부대공 물량을 양방향 기준으로 적용하여 공사시행토록 실정보고사항을 승인하고자 하며, 소요되는 공사비는 추후 설계변경시 내역에 반영하여 정산하고자 함.

□ 조치계획

○ 상기 검토의견에 대해 감독업무를 수행하고 있는 시설공단에 통보하고자 함.

붙임  실정보고 검토보고서 및 관련자료 1부.  끝.