문서번호	방재시설부-14144
결재일자	2019.9.23.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		조경시설과장	방재시설부장
김달용		신용우	09/23 이임섭
협 조
	환경시설과장			오열상
	주무관			차성민

『양평1유수지 CSOs 저류조 설치공사』

건설사업관리기술자(조경상주) 투입기간 변경 검토보고

2019. 9.

도시기반시설본부

(방재시설부)

『양평1유수지 CSOs 저류조 설치공사』

건설사업관리기술자(조경상주) 투입기간 변경 검토보고

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

『양평1유수지 CSOs 저류조 설치공사 감독권한대행 등 건설사업

관리용역(장기계속)』추진과 관련하여 조경 건설사업관리기술자 투입

기간 변경 승인요청에 대한 검토 보고임.

▸관련공문 : 양평1유건 제2019-267호(‘19.09.19)

Ⅰ		용역개요

○ 위    치 : 영등포구 국회대로 22길 20 (양평1 유수지내)

○ 규    모 : CSOs 저류조 Q=46,000㎥, 건축(설비동) 1식

□조경공사 : 수목식재(교목62주, 초화류 13종), 조경시설 11종 등

○ 용역기간 : 2016.10.10 ~ 2019.11.15

○ 감 리 사 : ㈜경동엔지니어링 외 3개사

○ 용 역 비 : 1,813백만원

Ⅱ		실정보고

○ 조경분야 상주감리원 투입기간 변경

□승인요청 사항

분 야 (등급)	성 명	배치계획		비 고
		당 초	변 경
조 경 (특급)	안병도	‘19.01.02~’19.10.31 [10월]	‘19.01.02~’19.10.20 ‘19.11.04~’19.11.15 [10월]

□변경투입 사유

- 시설공사 준공기간과 병행하여 공정관리 및 공사 마무리에

차질이 없도록, 투입개월 증가없이 배치계획 조정

(투입종료일 변경 : ’19.10.31 →‘19.11.15)

Ⅲ		검토결과

○ 배치계획 변경

□현재 유수지 상부 체육공원 시공 중으로 당초 ‘19.10.31 투입종료로

계획되어 있어

□공사준공과 병행하여 조경공사 공정관리 및 마감공사에 차질이 없도록

배치기간 조정함이 적정함

[조경공사 완료시점에 유지관리부서(영등포구)와 현장점검 등 수행]

체육공원 조성계획	저류조 상부 현황

Ⅳ		보고자 의견

○ 양평1유수지 CSOs 저류조 설치공사 건설사업관리용역(감독권한대행)과

관련하여 조경분야 상주감리원의 변경배치를 검토한바

○ 상부 체육공원 조성에 따른 마감공정의 적정배치로 판단되어 변경투입 승인

하고자 함

붙임 : 관련공문 1부.  끝.