문서번호	시설보수과-8270
결재일자	2019.9.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	강서도로사업소장
강연홍		박병연	09/23 박문희
협 조

준공기한 연기 검토보고

『목동교 보수공사』

2019. 9.

강서도로사업소

[시설보수과]

준공기한 연기 검토보고

2019도 예산사업으로 추진중인 『목동교 보수공사』에 대한 준공기한 연기 검토보고 임

Ⅰ		공사개요

❍ 공 사 명 : 목동교 보수공사

❍ 공사기간 : 2019. 4. 8 ~ 2019. 10. 04

❍ 계약금액 : 575,593,000원

❍ 시 공 사 : 삼진비에스(주)  대표 박 철 수

❍ 주요공정 : 교면방수 및 아스콘포장 48.8@, 표면보수 285㎡ 등

❍ 공 정 율 : 32%

Ⅱ		그간 추진사항

❍ 2019. 3. 11 : 공사발주

❍ 2019. 4. 08 : 공사착공

❍ 2019. 9. 19 : 공사추진에 따른 실정보고(서울시설공단)

Ⅲ		보고내용

▣ 준공기한 연기 검토 보고

❍ 서울시설공단 공사감독1처-5840호(‘19.9.19)와 관련 보고사항

1) 포장공사 관급자재(아스팔트혼합물 및 1등급 골재)의 사전선정 시험기간 소요에 따른 절대공기가 부족한 실정으로, 검토결과 준공기한 연기는 타당한 것으로 판단됨.

‣ 관급자재(아스팔트혼합물 및 1등급골재) 사전선정 시험기간71일 소요(시험의뢰 ‘19.6.24, 적격통보 ’19.9.2)

‣ 현재기준 잔여공정 감안 70일 소요

(아스콘포장 및 방수후 바닥판하면 단면보수 등 실시)

2) 절대공기 부족으로 인한 준공기한 연기 요청

구 분	당 초	변 경	비 고
공사기간	2019. 4. 8. ~ 2019. 10. 4	2019. 4. 8 ~ 2019. 12.13	70일 연장

Ⅳ		조치의견

▣ 서울시설공단 보고내용과 같이 관급자재 선정시험으로 공사시행에 따른 절대공기가 부족하므로 준공기한을 연기하여 공사시행에 만전을 기하고자 함.

❍ 준공기한 연기 사유 :

-  관급자재 선정시험 기간소요 및 후속공종에 따른 절대공기 부족

❍ 공사기간 변경

- 당 초 : 2019. 4. 8 ~ 2019. 10. 4

- 변 경 : 2019. 4. 8 ~ 2019. 12. 13(70일 연장)

❍ 지체상금 부과 여부 : 미 부과

Ⅴ		향후계획

▣ 2019. 9. 24 : 준공기한 연기 요청 (관리단속과)

▣ 2019. 9. 25 : 변경계약

▣ 2019.12. 13 : 공사준공

따로붙임  1. 준공기한 연기의뢰서 1부.

2. 관련공문 1부.   끝.