문서번호	급수운영과-18707
결재일자	2019.9.23.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	급수운영과장
이훈재		유명수	09/23 채재일
협 조

노후밸브 정비에 따른 단수계획

(용산구 청파동2가 16, 104-1번지 일원)

2019. 9.

중부수도사업소

(급수운영과)

소화전 노후밸브 정비에 따른 단수 계획 보고

******************* 2개소 소화전 노후밸브 교체에 따른 부득이 단수가 수반되어 해당 지역에 단수 및 공사 안내를 실시함으로써 단수 및 녹물 출수로 인한 시민 급수 불편을 최소화하고자 함.

공사현황

○ 공 사 명: 2019년 용산, 중구 관내 시설물설치 및 보수공사(단가계약)

○ 계약업체: ㈜가빛 대표 송나영

○ 작업개요

지시번호	작업위치	공사기간	공사개요	비고
노후밸브(소) 2-22, 23	용산구 청파동2가 16, 104-1 (2개소)	2019. 8. 14 ~ 2019. 9. 30.	노후밸브 (D100mm)교체	주간

단수현황

연번	작업위치	단수일시	단수(추정)세대	비고
1	청파동2가 16	2019. 9. 25.(수) 11:00~14:00 (1시간)	50세대	주택밀집
2	청파동2가 104-1	2019. 9. 25.(수) 11:00~14:00 (1시간)	30세대	주택밀집

작업 및 단수시간 산출내역(공사별)

연번	작업계획	소요시간	작업내용	비고
1	제수밸브 개폐	10분	D=100mm, 2개소
2	퇴수	10분	소화전(청파동2가 16, 104-1 앞)
3	플렌지 철거	10분	D=100mm 플렌지 철거
4	플렌지 접합	10분	D=100mm 플렌지 접합
5	세척 및 통수	20분	소화전 및 관말 계량기앞
	계	60분

홍보 계획

○ 단수안내문 배포 및 부착

- 공사일정에 따라 단수지역을 구분하여 안내문 배포

- 단수 안내문은 공사 2일전 1가구 1매씩 배포

- 벽보용 안내문을 통행이 잦은 단수지역 골목입구 및 골목 내에 부착

○ 홈페이지 게재 및 사업소 현장민원과 단수계획 안내

- 상수도사업본부 홈페이지

○ 다량 급수처 단수안내

- 병원, 학교, 주요기관 등은 직접 방문하여 단수안내문을 전달하고 사유를 설명

- 저수조 만수위 확보 독려 및 절수 홍보

○ 민원발생이 많은 영업집 단수안내

- 음식점등 다량 급수처는 직접 방문하여 단수안내문을 전달하고 사유를 설명

- 사용할 수돗물을 단수 전에 미리 용기 등에 충분히 받아 사용토록 안내

※ 우천 등으로 작업 연기 시에는 별도 통보 예정

시공회사 및 감독 연락처

구 분	성 명	연 락 처
시 공 회 사	㈜가빛 대표 송나영	*************** ***************
현 장 소 장	김윤철	*************
공 사 담 당	이훈재	************
공사 감리자	윤양원	************

처리계획

○ 상기 공사 건은 노후밸브 교체로 반드시 단수가 수반되는 공사 임.

○ 산출된 단수시간 내에 해당 공종이 완료될 수 있도록 시공업체 및 감리에게 지시하고,

○ 사전에 충분히 퇴수작업 실시로 통수 후에도 수질 관련 민원 최소화하고자 함.

붙임  현장조사서 및 단수안내문 각 1부.  끝.